함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰〔상수도공사(급수,누수복구)시공감독업무 위탁용역(장기계속단가계약)〕

1. 우리본부에서 시행중인 『상수도공사(급수,누수복구)시공감독업무 위탁용역』 에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별 계약금액을 변경계약 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 상수도공사(급수,누수복구)시공감독업무 위탁용역(장기계속단가계약)

나. 용역기간 : ‘15. 1. 1 ~ ’15. 6.21 (총 부기기한 ’13. 5. 25 ~ ’15. 6. 21)

다. 예산과목 : 상수도사업비 영업비용 급수공사비 신설공사비

상수도사업비 영업비용 배급수비 수선교체비(누수,불용관 감리비)

라. 계 약 자 : ㈜이준엔지니어링 〔대표 이방열〕 외 1개사

마. 변경내역 (3차 및 총 부기금액)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총부기 금액	9,131,891,000	9,598,996,000	증)467,105,000
1차수 금액 (‘13.5.25~’13.12.31)	2,717,451,000	2,717,451,000	-
2차수 금액 (‘14.1. 1~’14.12.31)	4,792,568,000	4,792,568,000
3차수 금액 (‘15.1. 1~’15. 6.21)	1,621,872,000	2,088,977,000	증)467,105,000

바. 설계변경 사유 : 1, 2차수에서 조정된 야간 및 휴일 근무증가 및                                    용역기한 연기에 따른 감리투입 및 차량비 증가

따로붙임 : 1. 설계변경 및 정산시행 1부.

2. 설계변경시행에 따른 예산확보 방안 1부.

3. 설계변경 소 위원회 개최 결과 보고 1부.

4. 위탁감리 용역기간 연기에 따른 실정보고 1부.

5. 설계변경 사유서 1부.

6. 설계변경 내역서 1부.

7. 변경 합의서 1부.  끝

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김형준		급수설비과장	김기상		급수부장	06/18 이규상
협조자
시행	급수설비과-4233	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1474	/전송	02-3146-1429	/	doksule@seoul.go.kr	/	대시민공개