문서번호	급수운영과-14213
결재일자	2015.6.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	06/18 조면행
협조
	주무관		이일로

단위공사 예산 절감 보고

(신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사)

2015. 06

강서수도사업소

실 정 보 고 서

우리과에서 시행하는 “신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사” 추진 중 예산 절감이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사위치 : 신월동55-16~82-11간외 7개소

다. 공사개요 : D=20~300mm, L=2,019m

라. 공사기간 : 2015.04.15.~2015.12.12

마. 시 공 사 : 윤석산업(주) 대표 이행철

바. 도 급 비 : 금421,702,390원

2. 보 고 내 용

가. 단위공사 발주시 상수도 맨홀 철개고정장치를 사급자재로 설계되었으나 공사진행중

철개고정장치 일체형 철개 우수제품이 개발되어

나. 특정제품 사업소 심의위윈회 개최 결과(급수운영과-4556) 사용성이 우수하여 단위공사 계약업체

협의하에 시공에 반영함.

3. 예산 절감 결과 보고

위와 같은 사유로 철개고정장치 일체형 철개를 사용으로 인한 총공사비(도급비, 자재비)

검토 결과 아래와 같이 단위공사 예산 절감 사항이 발생하여 이를 보고합니다.

-   아         래     -

ㆍ 공     정 : 철개고정장치 시공(N=28개소)

ㆍ 당초 금액 : 금20,727,000원

ㆍ 변경 금액 : 금11,946,000원

ㆍ 예산절감액 : 금8,781,000원

붙임 : 1. 수입물품 및 특정제품 선정심의위원회 개최 결과 1부.

2. 내역서 1부.  끝.