문서번호	시설관리과-10215
결재일자	2015.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
유준영	문용욱	代최양주	05/20 代이만섭
협 조

2015년 상수도관 전식방지 공사 시행계획

2015. 5. 20(수)

강서수도사업소

(시설관리과)

2015년 상수도관 전식방지 공사 시행계획

우리사업소 비방식 상수도 관로(강관)에 전식방지 시설을 설치하여 부식으로 인한 누수를 방지하고 내구연수를 연장시켜 유수율 향상 및 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함.

시행근거

상수도관 전식방지사업 추진계획(본부장방침 제705호, 2008.12.26.)

‘15년 상수도관 전식방지사업 추진계획(본부 시설관리과-267, 2015.1.13.)

2015년 예산배정 내역

사 업 명	과 목	사 업 비	비고
상수도관 전식방지사업	시설비	300,000천원
	감리비	33,000천원
합 계		333,000천원

※ 투자심사(2010. 10월 재정담당관) 결과에 따른 연차별 사업추진

2015년도 사업계획

사업대상

수 계	관경(mm)	사업대상 위치	설계도면 번호	설계연도
목동	1,650	영등포정수장~가양사거리	A-027-1	2009년
신정	1,650	신정배수지~신정배수지 입수	A-031	2009년

방식방법 : 외부전원법

사업개요

- 방식용 정류기 설치 2개소

- 양극공(Φ200mm) 보링 및 양극매설 10개소

- 전기인입 및 배선공사 1식

발주계획

전기방식공사

- 계약방법 : 제한경쟁(지역제한)

- 입찰자격 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 사무실이 서울시에 소재한 업체

- 소요예산 : 300,000천원(관급자재비 포함)

- 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비

- 공사기간 : 착공일로부터 120일까지

감리용역

- 계약방법 : 제한경쟁(지역제한)

- 입찰자격 : 전력기술관리법 제14조에 따른 전력종합감리업 또는 전력전문감리업 등록업체로서 주된 사무실이 서울시에 소재한 업체

- 소요예산 : 33,000천원

- 용역기간 : 착수일로부터 120일까지

방식용 정류기(관급자재)

- 계약방법 : 제한경쟁(실적제한)

- 입찰자격 : 외부전원식 전기방식용 자동정전위형 정류기를 직접 제조하여 납품한 실적이 있는 업체

- 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비

추진일정

전기방식공사 계약심사 의뢰(본부) : 2015. 5. 21 ~ 6. 1

감리용역 타당성심사 의뢰(본청) : 2015. 6. 2 ~ 6. 10

전기방식 공사 및 감리용역 발주 : 2015. 6. 11 ~

전기방식 공사 및 감리용역 계약 : 2015. 6월

전기방식 공사 및 감리용역 착공 : 2015. 6월

공사완료 예정 : 2015. 10월

기대효과

상수도관로 누수방지 및 내구연수 연장

안정적인 아리수 공급체계 유지.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원 ☎3146-3990 기전팀장 : 문용욱 ☎4015 담당 : 유준영 ☎4016