문서번호	시설보수과-2180
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김형섭		박춘배	06/19 이종엽
협조

설계변경 검토보고(1차)

2015년 터널·복개 및 지하차도일상유지보수공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

성동도로사업소

(시설보수과)

설계변경(1차) 검토 보고

(2015년 터널·복개 및 지하차도 일상유지보수공사)

우리 사업소에서 시행 중에 있는 『2015년 터널·복개 및 지하차도 일상유지보수공사』의 계약금액 변경없이 시공물량 증․감에 따른 설계변경을 시행하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

공사개요

공 사 명 : 2015년 터널·복개 및 지하차도 일상유지보수공사

공사기간 : 2015. 03. 24 ~ 12. 31

사업개요 : ○ 콘크리트 균열보수     L=950m

○ 콘크리트 표면보수     A=2,460㎡

○ 콘크리트 단면보수     A=1,840㎡

도 급 액 :  428,807,920원

도 급 자 : 비엔티엔지니어링(주) 대표 이상민

Ⅱ

보고내용

설계변경 사유

▶ 계약금액은 변경 없고, 시공물량 증 ․ 감에 따른 변경

▶ 풍수해 대비 지하차도 집수정(펌프실) 준설 외 16개 신규공종 발생

주요 공종 물량 증․감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증․감
콘크리트 균열보수	B=0.3~1.0㎜, T=100㎜	m	950	338	감)140
콘크리트 표면보수	T=1~3㎜	㎡	480	1,995	감)255
콘크리트 단면보수	T=10~30mm	㎡	902	165	감)737
지하차도 집수정 준설	흡입	㎥	-	243	증)243
중앙분리대 안전빗금도색	페인트(황·흑색)	㎡	-	1,800	증)1,800

공사비 변경내역

【단위 : 원】

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		450,807,920	450,807,920	-
도급비	계	428,807,920	428,807,920	-
	공급가액	389,825,381	389,825,381	-
	부가가치세	38,982,539	38,982,539	-
관급비		22,000,000	22,000,000	-
이전비		0	0	-

예산과목

▶ 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척)일상유지보수,

시설비및부대비, 시설비

Ⅲ

조치의견

상기 내용과 같이 총 계약금액 변동은 없고, 시공물량 증 ․ 감 및 신규 공종 발생에  따라 『2015년 터널·복개 및 지하차도 일상유지보수공사』의 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 :  설계변경 내역서 1부. 끝