문서번호	건축부-6997
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	의료시설과장		건축부장
신현성	송종훈		전결 06/19 김우성
협 조
	주무관					이광백

서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사

계 약 변 경(1차공사) 검 토 보 고

2015 . 6

도시기반시설본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사

계 약 변 경(1차공사) 검 토 보 고

우리 본부에서 추진중인 『서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사』와 관련하여 검토한 바, 공사비 집행에 대한 내용을 보고 드림.

1. 공사개요

○ 위    치 : 서초구 내곡동 6-7번지 (서울시어린이병원 부지내)

○ 용    도 : 의료시설

○ 공사내용

- 증    축 : 지상2층 지상5층, 연면적 11,950.88㎡

○ 건축공사비 : 13,367백만원 (도급비 10,948백만원)

- 1차 공사비 : 6,500백만원

○ 공사기간 : 2015. 1. 20 ~ 2017. 02. 19

- 1차 공사기간 : 2015. 1. 20 ~ 2016. 01. 19

2. 추진경위

○ `13.04.18 : 서울특별시 어린이병원 발달센터 건립(증축)계획 수립

○ `14.05.13 : 설계용역 계약체결

○ `14.05.28 : 설계용역 착수 및 착수보고회

○ `14.10.30 : 설계의 경제성 등(VE) 검토 완료

○ `14.11.06 : 건설기술심의 완료

○ `14.11.18 : 일상감사 완료

○ `14.11.21 : 계약심사 완료

○ `14.11.25 : 계약심의 완료

○ `14.12.30 : 건축공사 계약

○ `14.12.30 : 건설사업관리용역(감리) 계약

○ `15.01.20 : 건축공사 착수

3. 검토 근거

○ 서도기건-74(2015.6.12.)호 1차 계약금액 변경 요청 검토 보고

4. 건축공사비 현황 및 공사계약 변경내용

□ 건축 공사비 현황 (계약)                    (단위: 천원)

구 분	건축공사비				비 고
	총 계	도급비	관급비	이설비 등
총 계	13,367,621	10,948,951	2,344,670	74,000	건축부
건 축	9,629,737	7,481,217	2,074,520	74,000
토 목	2,786,620	2,737,980	48,640	-
조 경	951,264	729,754	221,510	-

□ 공사계약 변경 내용

(단위: 원)

구 분	변경전		변경후		비 고
	총차	1 차	총차	1 차
공 사 비	10,948,951,490	6,500,000,000	10,948,951,490	5,200,000,000	1차공사비 –1,300,000,000
공사기간	2015. 1. 20 ~2017. 2.19	2015. 1. 20 ~2016. 1.19	2015. 1. 20 ~2017. 2.19	2015. 1. 20 ~2015.11.30	50일 단축

5. 검토사항

○ 건설사업관리자 의견과 같이 1차공사비용 13억 감액시키고 공사기간       변경하는 것이 타당함

- 1차 감액 부분 13억은 다음차수 공사비로 사용

6. 행정사항

○ 재무과 계약의뢰.

붙임  건설사업관리단 보고서.  끝.