투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경에 따른 재계약 의뢰 (2015년 터널,복개 및 지하차도일상유지보수공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2015년 터널,복개 및 지하차도 일상유지보수 공사』에 대하여 아래와같이 설계변경(1차)을 시행하고 재계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2015년 터널,복개 및 지하차도 일상유지보수 공사

나. 도 급 자 : 비엔티엔지니어링㈜ 대표 이상민

다. 공사기간 : 2015. 03. 24 ~  12. 31

라. 계약금액 : 금428,807,920원

마. 설계변경사유 : 계약금액 변동없고, 시공물량 증 ․ 감 및 신규공종

발생에 따른 설계변경(풍수해대비 지하차도 집수정 준설 등)

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		450,807,920	450,807,920	-
도급비	계	428,807,920	428,807,920	-
	공급가액	389,825,381	389,825,381	-
	부가가치세	38,982,539	38,982,539	-
관급비		22,000,000	22,000,000	-
이전비		0	0	-

사. 예산과목 : 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개, 지하차도,세척)일상유지보수,

시설비및부대비, 시설비

별 첨 :  1) 설계변경 시행방침  1부.

2) 설계변경 검토보고서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.

4)  합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김형섭		시설보수과장	06/19 박춘배
협조자
시행	시설보수과-2187	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 자동차시장길 41	/
전화	02)2210-1551	/전송	02)2210-1562	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개