문서번호	시설보수과-5145
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김영원		전결 06/19 정재현
협조

실정보고사항 검토결과 보고

(창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사)

2015. 6

북부도로사업소

시설보수과

실정보고사항 검토결과 보고

(창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『창동지하차도 장애인 이동 편의시설

설치공사』에 대하여 시공사로부터 실정보고한 사항 검토 보고 임.

공사현황

❍ 공 사 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

❍ 공사기간 : 2014. 11. 26. ∼ 2015. 6. 30.

❍ 도 급 액 : 742,258,700원

❍  공사개요  :  콘크리트암거(2.1×2.6)설치 26m, 엘리베이터 덕트설치 14m,

도로포장 31.4a, 보도포장 501㎡, 하수관이설 106m, 표면보수 810㎡

❍ 도 급 자 : 주식회사 고황 대표 정삼술

실정보고 내용

❍ 아스팔트 포장면적 증가 및 이마트부지 사용 협의시 이마트에서 조건부로 제시한 옥상조경에 따른 조경물량 증가

❍ 당초 설계시 공사구간에 설치되어 있는 빗물받이에 대해 1개에 대하여만 신설하고 기 설치된 3개에 대하여는 재 활용코자 하였으나 터파기 등 공사중 불가피하게 철거가 되어 기존 3개에 대하여도 전면교체 시행함에 따라 신설이 3개소 증가(현장 방문시 교체지시한 사항 임)

❍ 공사비 증감 : 약 10,830,000원 증

검토결과

이마트부지 사용 협의시 이마트에서 조건부로 제시한 옥상조경건으로 설계시 조경공사를 위해 이설비로(3천5백만원) 확보된 사항으로 타당하며,

빗물받이 추가 및 포장면적 증가는 발주처 현장방문시 지시한 사항으로 실정보고 사항과 같이 처리함이 타당 함.

조치사항

시공사 의견과 같이 처리토록하고 추후 설계변경시 반영 조치

검토결과 시공사에 통보

붙  임 : 실정보고서 공문 1부.  끝.