문서번호	시설과-3657
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장
이상국	代이춘한	06/19 심상원
협 조
	총무과장		이경로
	주무관		김현정

들소사 지붕개량및구조체 보수보강공사 실정보고에 따른 설계변경 검토보고

2015. 06.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

들소사 지붕개량및구조체 보수보강공사』

실정보고에 따른 설계변경 검토 보고

『들소사 지붕개량 및 구조체 보수보강공사』시행 중 시공자가 제출한 실정보고서에 대하여 설계변경 사항을 아래와 같이 검토 보고합니다.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 들소사 지붕개량및구조체 보수보강공사

□ 공사기간 : 2015. 04. 28 ~ 2015. 06. 28

□ 시 공 자 : ㈜신림종합조경

□ 도 급 비 : 88,049,000원

□ 주요 공사내용

○ CONC.그늘막 지붕바닥 및 벽면 균열보수와 단면보수

○ 그늘막 지붕 바닥 방수공사

○ CONC.그늘막 외벽일부 수성페인트 도장공사

○ 그늘막 지붕 아스팔트슁글 설치공사 등

2		실정보고 및 설계변경

□ 주요 변경사항

○ 도장면적 증가로 외벽수성페인트칠 및 바탕만들기 물량증가

- 기존 도장면적(처마부분:208㎡) → 변경 도장면적(처마＋기둥부분:810㎡)

○ 지붕방수공사 바탕처리 물량증가

- 기존 방수면적(0.0㎡) → 변경 방수면적(549㎡)

□ 공종별 변경내용

(단위 : 천원)

공 종 별	변 경 내 용	소요예산 (개략금액)
∘ 철근콘크리트 공사	∘ 단면보수 물량 감소	감) 3,669,139
∘ 방수공사	∘ 바탕처리 물량 추가	증) 3,292,188
∘ 도장공사	∘ 바탕만들기 및 수성페인트칠 물량증가	증) 7,528,612
∘ 지붕및홈통공사	∘ 증, 감 없음	-
∘ 경비	∘ 산재보험료, 고용보험료 ∘ 기타경비 ∘ 간접노무비 ∘ 퇴직공제부금비 ∘ 일반관리비, 이윤, 부가가치세	증) 4,199,339
합 계		증) 11,351,000

3		예 산 현 황

□ 사업비 변경

(단위 : 원)

사 업 명	금 액	계약금액	설계변경	비 고
들소사 지붕개량및구조체보수보강공사	도 급 금 액	88,049,000	99,400,000	증 11,351,000
	총 공사비	88,049,000	99,400,000	증 11,351,000

□ 예산집행 계획

○ 증가되는 공사비 11,351,000원에 대해서는 “위공사 낙찰차액 ”을 활용하여 설계변경 계약 추진

□ 예산과목

○ 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 동물사관리 기능 및 야생동물종보존, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비

4		조 치 의 견

□ 위와 같이 변경내용을 시공자에게 선 시공 지시하고, 준공시 정산설계변경 시행코자 함. 끝.