투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	제6차 작업지시관련 작업기한 연기(포장도로긴급복구공사)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도로보수과-4716(2015. 5.12)호와 관련입니다.

3. 2015년 포장도로긴급복구공사(연간단가)와 관련하여 제6차 작업이 진행중인바, 아래와같이 작업기한을 연기시행하여 도로불편을 해소코자하 합니다.

가. 건  명 : 2015년 포장도로긴급복구공사(연간단가) 제6차 작업 기한연기

나. 제6차 작업개요

- 작업기간: 2015. 5.13 ∼ 6.15(야간)

- 위    치: 성산로 등 6개노선 21개소

- 공    종: 소파보수 A= 8.82a

다. 작업기간 연기

- 당초기한 : 6.15    - 변경기한 : 6.22

- 사유 : 강우로 인한 작업기간 연기

※ 강수일 : 5/19,5/30,6/5,6/11,6/12,6/13,6/14.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	(주)범한엔지니어링종합건축사사무소,(주)도화건설 대표이사 김선영
주무관	이상하		도로보수과장	06/19 이규철
협조자
시행	도로보수과-6039	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8351	/전송	02-300-8364	/	sanghal@seoul.go.kr	/	대시민공개