함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	강북 고도정수처리시설 연결공사와 관련 관계자회의 개최

1. 고도정수반-1393호(2014.3.4)와 관련입니다.

2. 우리본부(고도정수반)에서 시행중인「강북정수장 고도정수처리시설공사」와 관련 기존 정수시설과 고도정수시설 연결공사 시행으로 강북 아리수정수센터 생산량이(100→50만톤/일) 감소됨에 따라 아래와 같이 관계자회의를 개최하오니 관련 자료를 지참 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일    시 : 2014.3.13.(목) 15:00

나. 장    소 : 본부 2층 회의실

다. 안    건 : 강북아리수정수센터 공급량 감소에 따른 급수운영 및

수계 전환시 문제점 검토

라. 참석대상

- 본     부 : 생산관리과, 고도정수반(현장소장, 감리포함)담당 주무관

- 수도사업소 : 중부(시설관리과), 서부(급수운영과), 동부(시설관리과),북부(급수운영과) 담당주무관(직반장 포함)

- 정수센터 : 구의, 뚝도, 암사, 강북아리수정수센터(운영과) 생산총괄 담당주무관

마. 회의 준비 자료

- 생산관리과 : 他 시도(구리, 남양주시) ’14년도 일 최대 및 평균 공급량

- 고도정수반 : 공사시행 방법, 연결공사 단축시간 검토 및 관련자료

- 수도사업소 :

① 각 사업소별 강북아리수정센터 지역 배수지 급수운영 현황 작성(붙임 양식에 의거 배수지 운영 담당주무관 작성 제출)

※ 지역배수지 : 공릉, 월계, 월곡, 북악터널(유입, 유출), 불광, 백련배수지

② 수계 전환시 급수운영에 대한 문제점 및 대책

㉮ 동교동지역 수계전환(강북→뚝도, 2만톤/일)(서부)

㉯ 동대문지역 수계전환(강북→구의, 5만톤/일)(동부)

㉰ 신내지역 수계전환(강북→구의 2만톤/일)(동부)

※ 수계 전환시 제수변 조절 위치도면 작성 제출

- 아리수정수센터

① ’13년 일 최대생산∙공급량 및 월평균생산∙공급량 제출(강북)

- 1계열(50만톤) 최대 생산가능량 검토(강북)

② 아차산 배수지 공급량 증가에 따른 검토(구의+암사→암사 6만톤/일)(암사)

③ 용마배수지 공급량 증대에 따른 검토(구의 1만톤/일)(구의)

④ 와우산배수지 공급량 증대에 따른 검토(뚝도 2만톤/일)(뚝도)

※ 관련부서는 상세하게 보고자료를 작성하고 회의시 보고할 수 있도록 준비 철저.

붙임 : 1. 배수지 급수운영 현황 작성(양식)

2. 강북 대체급수(수계전환) 도면 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,고도정수반장,중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),구의아리수정수센터소장(운영과장),뚝도아리수정수센터소장(운영과장),암사아리수정수센터소장(운영과장),강북아리수정수센터소장(운영과장)
주무관	신근호		배수과장	박기범		급수부장	03/06 이상홍
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-1479	(		)	접수		(		)
우	121-030	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1434	/전송	3146-1429	/	smile1010@seoul.go.kr	/	대시민공개