문서번호	시설개선과-5272
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상호	신동호	06/22 이구석
협 조
	운영기획과장		김남대
	주무관		이상욱

편의시설 주변 휴식공간 설치계획 보고

2015. 6.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

편의시설 주변 휴식공간 설치계획 보고

통합안내소를 편의시설(카페)로 개선함에 있어 편의시설 주변 휴식공간을 설치하여 서울종합운동장을 찾는 시민들에게 쾌적한 환경을 제공코자 합니다.

Ⅰ		사업추진 배경

□ 운영기획과-7787(2015.6.12)

❍ 편의시설 설치에 따른 시설이용 고객 휴식공간(데크) 조성요청

Ⅱ		사업내용 및 발주방법

□ 사업내용

❍ 공사명 : 편의시설 주변 데크설치공사

❍ 규  모 : 합성목재 데크설치 127.23㎡, 기타 토목공사 1식 등

❍ 기  간 : 2015.6.29~7.15

❍ 금  액 : 30,600천원(도급비 15,200천원+관급비 15,400천원)

□ 발주방법

❍ 공사 : 공사금액(15,200천원)이 소액으로 건설산업기본법 제8조 및 동법

시행령 제7조 별표1에 의한 『금속창호구조물업』 면허소지자중 최소 견적사와

수의계약 시행

❍ 자재 : 합성목재 조달구매 시행

- 1 -

Ⅲ		예산검토 및 추진일정

□ 예산검토

❍ 소요예산 : 30,600천원

❍ 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 경기장시설물유지보수공사,

시설비및부대비, 시설비(집행잔액 사용)

□ 추진일정

❍ 2015. 6.29 : 발주방침

❍ 2015. 6.30 : 계약 및 착공

❍ 2015. 7.15 : 준공

Ⅳ		검토의견

□ 세부 시행계획

❍ 녹지공간의 수목을 훼손시키지 않고, 지면에서 약 40cm 높이로 합성목재 사용하여 데크설치(천연목재의 경우 내구성이 떨어지며, 유지관리의 어려움이 있음)

❍ 휴식공간(데크)의 출입은 편의시설 방향 계단처리 하고, 스포츠종합상가 방향에서는 경사로로 처리하여 장애인 휠체어가 진입할 수 있도록 시공

❍ 휴식공간(데크)은 편의시설에서 1m이상 후퇴하여 설치

덧붙임  1. 설계도면 1부.

2. 설치 협조요청 공문 1부.  끝.

2 -