서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(동북권 도로기본구상 용역)

1. 도로계획과-8468(2015.6.19.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 추진중인 ‘동북권 개발에 따른 장래 교통수요 분석 및 발전 기본구상 용역’에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 동북권 개발에 따른 장래 교통수요 분석 및 발전 기본구상

2. 계약기간

가. 당초: 2015. 1. 5. ~ 2015. 7. 3.

나. 변경: 2015. 1. 5. ~ 2015.10.30. (120일 연기)

3. 계 약 자 : ㈜유신

4. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
계약금액	77,480,000	81,980,000	증4,500,000

5. 변경사유 : 창동상계 신경제중심지구(CBD) 계획 반영을 위한 과업기간 절대부족 및 도봉지하차도 연장 검토를 위한 경제성 분석 추가 용역 반영

6. 예산과목 : (도시개발특별회계)도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망확충, 동부간선도로확장 TF팀 운영, 사무관리비

붙 임 : 1. 설계변경(정산) 보고 1부.
2. 변경설계서 1부.
3. 변경계약합의서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	조선휘		도로시설계획팀장	한정무		도로계획과장	06/22 최동필
협조자
시행	도로계획과-8545	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 본관 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8082	/전송	02-2133-0763	/	groba@seoul.go.kr	/	대시민공개