문서번호	토목부-12782
결재일자	2015.6.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	06/22 노우성
협조

암사IC 제내지 도로노선 조정(부체도로→도시계획도로)검토 보고

- 구리암사대교 건설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

암사IC 제내지 도로노선 조정(부체도로→도시계획도로)검토 보고

암사IC 제내지 도로 노선조정(부체도로 → 도시계획도로)에 따른 검토 보고임.

※ 암사(감리) 2015 -341호(’15.6.19.) : 암사IC 제내지 도로노선 조정(부체도로→도시계획도로)에 따른 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’15.6.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.6.30)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 변경내용

구분	위 치	규 모	변 경 사 유
(당초)	서원마을 → 암사정수장	B = 4.5m L = 261m	- 도시계획도로 개설시 공사여건 불리, 이중투자 문제로 병행 결정(도로계획과) - 부체도로 단절(연결도로 수림대 조성) - 강동구 요청(최소 폭 7.5m 이상 )
(변경)	도시계획도로(폭 15m중 7.5m) → 암사정수장	B = 7.5m L = 460m

○ 추진경위

- ’10.03.16. : 암사IC내 미개설 도시계획도로 설치 요청(강동구→서울시)

- ’10.06.04. : 암사IC내 도시계획도로 개설방안 방침 수립(도로계획담당관)

‣ 향후 도로개설시 램프 저촉으로 공사여건이 불리해지고 공사비 이중투자 문제가 발생되므로 공사중인 암사대교 건설공사에 포함 시행(국토부 총사업비 요청)

※ 사업규모 : 폭 15m, 연장 426m, 사업비 48억원

- ’13.09.13. : 국토부 총사업비 조정결과 통보(국토부 → 서울시)

‣ 토공 램프 하부도로 BOX 미반영(서울시 부담으로 처리)

- ’13.10.11. : 총사업비 조정결과 통보(도기본 → 강동구)

‣ 도시계획도로(폭 15m) 총사업비 미반영으로 당초 계획(Box 4.5m)대로 추진

- ’13.10.30. : 도시계획도로 개설 관련 협조 요청(강동구 → 도기본)

‣ 향후 도로개설 계획을 감안하여 시설물(펌프장 등)유지관리에 지장이 없도록 램프를 통과하는 통로 Box 및 도로조성 최소 폭을 7.5m(보도2.0m, 차도 5.5m이상)이상 확보되게 반영 요청

- ’14.02.13. : 암사IC 도로개설 검토 회신(도로계획과→도기본)

‣ 장래 도로개설시 공사여건 등 이중투자 발생으로 조속 공사시행하고 총사업비 조정에 반영되게 국비 신청 준비

- ’14.02.21. : 업무지시(공사시행 : 폭 7.5m, 연장 476m)

- ’14.03.07. : 업무지시(도시계획도로 설계 등 공사조속 시행)

- ’14.05.16. : 제2차 사업계획변경(적정성)조정위원회 심의(적정)

‣ 관계부서와 면밀히 검토 후 폭원 결정, 통로암거 등 토공 중복굴착이 수반되는 구조물만 금회 시행

- ’14.09.02. : 총사업비 조정결과 통보(국토부→서울시)

‣ 도시계획도로 신설(1,645백만원) : 서울시 100% 부담 조건

- ’14.10.06. : 제89차 건설기술심의소위원회(설계) 심의(조건부)

‣ 연약지반 설계 반영 등

○ 주요 내용

구 분	당 초	변 경
부체도로	폭 4.5m, 연장 261m	폭 7.5m, 연장 460m
통로BOX
	- 통로 BOX : 4.5m×72m ‣ R-B Box : 4.5m×34m ‣ R-C Box : 4.5m×15m ※ Ramp - B,C : 암사대교 미반영 ‣ R-F Box : 4.5m×23m	- 통로 BOX : 7.5m×94m ‣ R-B Box : 7.5m×30m ‣ R-C Box : 7.5m×45m ‣ R-F Box : 7.5m×19m
보강토옹벽	-	H=0.83∼6.8m,L = 147m A=342㎡
수로암거	-	▣ 2.0m×2.0m,L=34m(재설치) 개거 2.0m×2.0m, L=61m(이설)
배수관	-	D=450∼1,000mm L=162m
설계용역	-	실시설계 용역 1식

※ 도로포장 등 부대시설 제외 : 향후 도로개설 공사시 시행(강동구)

○ 소요 공사비

(단위 : 천원)

공 종	규 격	단위	수 량			공 사 비			비고
			당초	변경	증·감	당 초	변 경	증·감
부체도로	폭 4..5 → 7.5m	m	261	460	증)199	57,924	1,160,876	증)1,102,951
제경비						11,166	241,760	증)230,594
설계용역비						-	71,000	증)71,000
공급가액						69,090	1,473,636	증)1,404,546
부가세						6,910	147,364	증)140,454
도급비						76,000	1,621,000	1,545,000
폐기물처리비						-	26,000	26,000	별도
총공사비						76,000	1,647,000	1,571,000

※ 단가적용

단가 적용시점(2014. 06)
신규단가	낙찰율 70.734% 적용
기 계약단가	기계약단가 적용	’06.05

○ 감리단 검토의견

- 암사IC내 미개설 도시계획도로 개설방안 방침 결정(2010.6.4.) 및 부체도로 접속부 수림대 조성(연결도로)으로 단절된 부체도로 노선 조정이 불가피함에 따라

- 사업계획변경 조정위원회 심의(적정) 및 건설기술심의 등을 거쳐 당초 군 작전통로인 부체도로 노선을 도시계획도로로 조정하는 사항으로 추가 공사비 반영은 타당함.

※ 신규단가 적용은 공사계약일반조건 제20조2항에 따라 낙찰율(70.734%)단가 적용

- 추가 공사비는 추후 설계변경위원회 자문결과에 따라 반영하는 조건으로 시행토록 승인함이 타당한 것으로 사료됨

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토내용과 같이 암사IC 제내지 도로노선 조정(부체도로 → 도시계획도로)에 따른 실정보고건에 대하여 조건부 승인하고 추후 설계변경위원회 자문결과에 따라 설계변경시 반영 정산 처리토록 조치코자 함.

- 암사IC 제내지 도로노선 조정(부체도로→도시계획도로) : 증) 1,545백만원

※ 폐기물처리비(별도 용역에 반영) : 26백만원

【조건부 승인】

① 도로 종·횡단 측량후 토공 중복여부(연결도로 포함) 확인후 정산

② 토적표상 포장단면부 토사 절토 여부 확인후 정산

③ 배수구조물(U형 측구 등)은 연결도로 공사와 중복여부 확인후 정산

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 1 부.  끝.