문서번호	인재기획과-7920
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설재무팀장	인재기획과장		인재개발원장
남성준	김종엽	박기용		06/22 안준호
협 조

다솜관 구조 보수․보강 안전진단용역 시행계획

2015. 6.

인재개발원

【 인재기획과 】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	▣
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	▣
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	▣
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	▣
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	▣
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	▣
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	▣
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	▣
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	▣	□

다솜관 구조 보수․보강 안전진단용역 시행계획

‘12. 7. 다솜관 정밀안전진단 결과에 따른 다솜관 기둥 및 바닥보에 대한 구조보강 공법에 대하여 공사발주를 위한 전문성이 확보된 설계도서 작성이 필요하여 설계용역을 추지코자 함

Ⅰ		용역 개요

□ 용역명 : 다솜관 구조 보수․보강 안전진단 용역

□ 위  치 : 서초구 남부순환로 340길 58(서초동) 인재개발원(다솜관)

□ 용역의 범위

❍ 주)신기굴알트구조진단연구원에서 다솜관 정밀안전진단 결과에 따라 제안한 기둥 및 바닥보에 대한 1~5층 보수․보강방안 제시, 보수․보강공법 제시

❍ 최적 방안에 대한 보수․보강 내역서 및 공사 시공도 작성 등

Ⅱ		용역 방법

□ 용역기간 : 2015. 7. 6. ~ 2015. 8. 5(계약일로부터 30일)

□ 계약기간 : 수의계약

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

❍ 사유

- 동종의 기술용역 경험이 있는 업체와의 조속한 계약을 위해『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제25조 제1항 제5호(2,000만원 미만 소액 용역)에 의한 수의계약 대상사업인 동 사업을『시설물의 안전관리에 관한 특별법』제9조 및 동법시행령 제11조 규정에 의거 건축분야 또는 종합안전진단기관으로 등록된 업체이며 국도교통부장관이 인정하는 건축분야 점검교육을 이수한 책임기술자를 보유한 업체와 수의계약 추진

Ⅲ		주요 과업내용

❍ 보수․보강방안 제시, 보수․보강공법 제시

❍ 검토보고서 작성

❍ 시공도면 작성

❍ 공사비 내역서 작성

❍ 기타 발주처 요구사항 등

Ⅳ		행정 사항

□ 소요예산

❍ 안전진단비 : 6,600천원

❍ 예산과목 : 인재원청사 보수ㆍ보강, 시설비(401-01)

□ 추진일정

❍ 안전진단용역 타당성 심사요청	: 2015. 6.

❍ 안전진단용역 시행	: 2015. 7.

❍ 공사발주	: 2015. 8.

❍ 공사착공 및 준공	: 2015. 8. ~ 2015. 9.