소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	후암119안전센터장
(경유)
제 목	동자동 제8구역 도시환경정비사업관련 소방용수시설 이설공사 연기 알림

1. 관련문서

가. 현장지휘대-10475(2014.10.31.)호 「동자동 제8구역 도시환경정비사업관련 소방용수시설 이설계획 변경 알림」

나. 쌍용건설 제7046-266(2015.1.15.)호 「한강대로 지상식 소화전 추가공사 일정 연기안내」

다. 재난관리과-471(2015.1.20.)호 「동자동 제8구역 도시환경정비사업관련 소방용수시설 이설계획 변경 알림」

2. 위와 관련, 우리 관내에서 소방용수시설 이설 공사에 대한 보완이

필요하여 다음과 같이 일정을 연기하여 알려드리니, 현장대응단 및 각119안전센터에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

구분	기존	변경
일정	2014. 9. 15.~ 2015. 5. 31.까지	2015. 7. 31.까지
연기사유	5월19일에 수도사업소에 공사요청을 하였으나 지연 예상되어 쌍용건설 측에서 공사기한 연기요청함

나. 추가공사 내용 : 소화전과 제수변의 간격이 멀어 제수변 위치 변경

다. 대상 소화전 (※ 987, 413호는 공사완료시까지 임시폐전함)

연번	용수번호	용수구분	식구분	주소	설치일자	관할
1	987	소화전	지상식	동자동 37-85	1992-12-01	후암
2	413	소화전	지상식	동자동 37-85	1987-12-01	후암

붙임 : 소방용수시설 이설예정지 위치도 및 사진(987호 등 2개소) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	06/22 김종구
협조자
시행	재난관리과-4680	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개