문서번호	인재기획과-7921
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설재무팀장	인재기획과장		인재개발원장
남성준	김종엽	박기용		06/22 안준호
협 조

다솜관 옥상공원 조성 및 옥상방수 설계용역 시행계획

2015. 6.

인재개발원

【 인재기획과 】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	▣
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	▣
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	▣
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	▣
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	▣
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	▣
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	▣
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	▣
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	▣

다솜관 옥상공원 조성 및 옥상방수 설계용역 시행계획

다솜관 등 시설환경 개선은 건물의 외관, 실내공간, 외부공간의 일관성 등을 위해 통합디자인 관점에서 이루어져야 하고, 또한 공사발주를 위한 전문성이 확보된 설계도서 작성이 필요하므로 설계용역을 추진코자 함

Ⅰ		용역 개요

□ 필요성

❍ 인재원 시설(배움관, 창의관, 다솜관)은 형태나 건립시기가 다르므로기능적, 형태적 통합 디자인 요소가 필요함

❍ 다솜관과 창의관을 연결하는 보행 연결 회랑 등으로 저층부 통합이 필요함

❍ ‘15.2.24. 인재원시설에 대한 외부전문가(2인-디자인분야, 건축설계분야) 컨설팅 결과, 선 설계 후 공사 시행함이 타당하다는 의견과 함께 전문성이 확보된 설계도서 작성이 필요함

□ 용역명 : 다솜관 옥상공원 조성 및 옥상방수 설계용역

□ 위  치 : 서초구 남부순환로 340길 58, 다솜관, 창의관

□ 용역의 범위

❍ 창의관~다솜관간 비가림막 연결통로 설치, 다솜관 옥상 방수 등

❍ 다솜관(1층) 옥상 공원조성, 안전난간대 설치, 1층 외벽 대리석 붙이기 등

Ⅱ		용역 방법

□ 용역기간 : 2015. 7. 6. ~ 2015. 8. 5 (계약일로부터 30일)

□ 계약방법 : 수의계약

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항제5호

❍ 사 유

- 동종의 기술용역 경험이 있는 업체와의 조속한 계약을 위해『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제25조 제1항 제5호(2,000만원 미만 소액 용역)에 의한 수의계약 대상사업인 동 사업을『건축사법』에 의거 건축사면허를 소지하고, 건축사무소를 서울에 개설등록을 필한 업체와 수의계약 추진

Ⅲ		주요 과업내용

❍ 실시설계에 필요한 자료의 수집, 정리

❍ 실시설계도면(CAD화 포함) 작성

❍ 설계내역서 작성

❍ 시방서 및 예정공정표 작성

❍ 공사 수량계산(물량산출) 및 견적 등

❍ 기타 발추처 요구사항

Ⅳ		행정 사항

□ 소요예산

❍ 설 계 비 : 15,562천원

❍ 예산과목 : 인재원청사 보수ㆍ보강, 시설비(401-1)

□ 추진일정

❍ 설계용역 타당성 심사요청	: 2015. 6.

❍ 설계용역 시행	: 2015. 7. ~ 2015. 8.

❍ 공사발주	: 2015. 8.

❍ 공사착공 및 시행	: 2015. 8. ~ 2015. 10.

❍ 공사완료 및 준공	: 2015. 10.