문서번호	토목부-12771
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
장기철		서관석	06/22 노우성
협조
	주무관		오열상

설계변경(총괄8회, 7차1회) 검토보고

(월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역)

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경(총괄8회, 7차1회) 검토보고

(월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역)

『월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역』안전분야 전담감리원 추가예산 반영 및 전기감리원 투입계획 변경에 따른 총괄 및 7차 감리용역에 대한 설계변경 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 「월드컵대교 건설공사 전면책임감리용역(총괄8회, 7차1회) 설계변경서」제출

[월드컵(감리)2015-286(2015. 6.18.)]

Ⅱ		용역개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 ～ 영등포구 양평동

○ 규    모 : 폭 6차로, 연장 1.98km

○ 사업기간 : ‘10. 1. 5. ～ ’15. 8. 4. (7차 : ‘15. 2. 4. ～ ’15. 8. 4.)

○ 용 역 비 : 7,856,830천원 (7차 : 351,210천원)

○ 용 역 사 : ㈜포스코엔지니어링 외 1개사

Ⅲ		설계변경 보고내용

○ 설계변경사유

- 안전분야 전담감리원(10개월) 추가예산(109,179천원) 반영 및 물가변동(2차, 3차) 반영시 착오로 과다계상한 손해배상보험료(5,309천원) 감액으로 총괄 계약금액 103,870천원을 증액하고

- 7차 계약은 북단IC 개통을 위해 투입한 전기감리원 1개월분에 대한 11,570천원을 증액하여 변경계약코자 함.

○ 감리비 변경현황                                   (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 괄	7,856,830,000	7,960,700,000	증 103,870,000
7 차	351,210,000	362,780,000	증 11,570,000

○ 감리기간 변경없음

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2010. 1. 5. ~ 2015. 8. 4.	변경없음
7 차	2015. 2. 4. ~ 2015. 8. 4.	변경없음

Ⅳ		조 치 의 견

○ 상기 내용과 같이 총괄 및 7차에 대한 설계변경을 추진하여 감리업무 추진에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 설계변경 내역서(총괄8회) 1부.

2. 설계변경 내역서(7차1회) 1부.  끝.