문서번호	교량안전과-11207
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
우창원		이수근	06/22 이용심
협 조

공사 실정보고에 대한 검토결과 보고

(동호대교 남단 진입램프 개량공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시안전본부

(교량안전과)

동호대교 남단 진입램프 개량공사

공사 실정보고에 대한 검토결과 보고

우리본부에서 추진하고 있는 『동호대교 남단 진입램프 개량공사』에 대하여 공사감독 위탁업무를 수행하고 있는 시설관리공단으로부터 공사실정 보고서가 제출되었기 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		공사개요

공 사 명  : 동호대교 남단 진입램프 개량공사

공사기간  : 2014. 7. 16 ~ 2015. 6. 30

총공사비  : 1,259,559,360원

(도급비: 1,115,488,880원, 관급비: 107,921,690원, 이전비: 36,148,790원)

공사개요  : 슬래브 철거 및 재설치 폭 7.5m, 연장 60m,

가설교량 설치 및 철거 폭 6.0m, 연장 57m

신축이음장치 교체 3개소 연장 20m

계 약 자  : ㈜두양종합건설 대표 김병주

감독기관  : 시설관리공단(공사감독2처)

Ⅱ		현황 및 문제점

관련근거 : 공사실정보고서 제출(시설관리공단 공사감독2처-7716, 2015.6.12)

내    용

- 본 공사는 2014년 7월 착공하여 12월 준공 예정으로 강재손율이 6개월로 설계되었으나, 준공기한이 2015년 6월 30일로 연기됨에 따라 가설교량 의 설치기간도 연장됨

- 가설교량 현장 입고 : 2014. 9. 25.

-  가설교량 현장 반출 완료 : 2015. 6. 12.

Ⅲ		공단 실정보고 사항

동호대교 남단 진입램프의 가설교량 설치기간이 연장됨에 따라 강재손료를 1년 미만으로 반영함이 타당하다고 사료며, 설계변경시 반영 처리

공사비 증·감 현황

공 종	명 칭	단위	금 액		비고
			당초	변경
가교 상부공	H-Beam,형강, 복공판, 강관파일등	식	35,016,642	58,152,023	증)23,135,381
가교 하부공	H-Beam,형강, 복공판, 강관파일등	식	24,161,639	40,124,968	증)15,963,329
소계(직접공사비)			59,178,281	98,276,991	증)39,098,710
제경비			26,305,068	38,137,358	증)11,832,290
도급액			85,483,349	136,414,349	증)50,931,000

Ⅳ		검토 의견

공단으로부터 제출된 실정보고 내용을 검토한 바, 건설공사 표준품셈   가설물의 재료 및 손율 적용이 필요함

강재손료를 1년 미만으로 변경하고자 하는 실정보고 사항이 타당하    다고 사료됨

Ⅴ		조치계획

상기 검토 의견과 같이 감독부서(시설관리공단)에 승인 조치하여 공사의 추진에 만전을 기하고자 하며, 추후 설계변경시 실물량 정산 반영토록 통보하고자 함.

붙임 : 공단 실정보고서 등 관련서류 1부.  끝.