함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	계약변경 시행(2015년도 LED조명등 교체공사)

1. 우리 센터에서 시행중인『2015년도 LED 조명등 교체공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년도 LED 조명등 교체공사

나. 공사기간 : 2015.4.29 ~ 2015.6.27

다. 도 급 액 : 21,684,760원

라. 도 급 자 : ㈜밝은세상종합전설 대표 김계식

마. 예산과목 : 자본적지출(200), 유형자산취득(230), 기계장치(235), 시설및부대비(401), 시설비(01)

바. 하자기간 : 준공일검사일부터 1년

사. 설계변경 내역(도급비)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 · 감
도 급 비	21,684,760원	19,198,000원	감)2,486,760원

아. 설계변경 사유 : 시공물량 증·감 및 보험료 정산

추산필 : 2015.6.22.(번호 : 22번)

붙임 : 1) 변경설계 내역서 1부

2) 설계변경 검토보고서 1부

3) 합의서 각 1부.  끝.

주무관	김상훈		주무관	주명호		정수시설과장	남효돈		소장	06/22 유성종
협조자	주무관	김희수		주무관	변민용
시행	정수시설과-2484	(		)	접수		(		)
우	134-053	서울 강동구 암사3동 아리수로 131 암사아리수정수센터	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	201005110@seoul.go.kr	/	대시민공개