문서번호	시설관리과-13782
결재일자	2015.6.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		남부수도사업소장
박행종	최희권	우종근		06/22 전영석
협 조

용역 준공기한 연기 보고

(2015년 영등포구 상수도공사 구간내 교통소통대책 수립 용역)

2015. 6

남부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

용역 준공기한 연기 보고

(2015년 영등포구 상수도공사 구간내 교통소통대책 수립 용역)

2015년 우리사업소에서 시행중인「2015년 영등포구 상수도공사 구간내 교통소통대책수립 용역」에 대한 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 변경 시행코자 보고합니다.

▢ 관련 근거

◯ 시설관리과- 3413(2015.02.16.)

「2015년 영등포구 상수도공사 구간내 도로점용 교통소통대책 수립 용역 계획」

◯ 행정지원과-1262(2015.02.26.)「비굴착 관 갱생공법 개선방안 시달」

◯ 행정지원과-7243(2015.03.27.)「용역계약체결 통보」

◯ 시설관리과-4808(2015.03.09.)「교통소통대책 수립 용역 시행」

◯ 행정지원과-7243(2015.03.27.)「용역계약체결 통보」

◯ 재무과-24409(2015.05.11.)「계약체결 알림-여의도동 33~」

◯ 재무과-28525(2015.06.04.)「계약체결 알림-당산동3가 393-2~」

▢ 용역 개요

◯ 용 역 명 : 2015년 영등포구 상수도공사공사 구간내 교통소통대책수립 용역

◯ 계 약 자 : 주식회사 천일  대표 김석환

◯ 계약일자 : 2015.03.27

◯ 계약금액 : 금27,285,500원

◯ 계약기간 : 2015.03.27. ~ 2015.06.27

▢ 준공기한 연기

◯ 당초 : 2015.03.27. ~ 2015.06.27

◯ 변경 : 2015.03.27. ~ 2015.10.31

▢ 검토보고 내용

◯ 남서울아파트앞 ~ 강남성심병원 간 송배수관정비공사 등 3건의 교통소통대책 수립 용역사업 경우 과업 특성상 해당공사 시공업체 협의 과정이 필수적임.

◯ 그러나, 현재 비굴착 관 갱생공법 개선방안 시달에 따른 신기술적용 공사발주와 공사업체 선정지연 등으로 서울시 교통소통대책심의위원회 심의 등 추진절차를 감안 일정변경이 불가피한 바,

부득이 2015.10.31.까지 준공기한 연기가 필요한 실정임.

공 사 명	공사기간	현 진행사항	교통심의 일정
남서울아파트앞 ∼ 강남성심병원간 송수관정비공사	미정	기술심사담당관 자문 중 (계약심사 및 발주 6∼7월 예정)	2015년 9월 중
당산동3가 393-2 ∼ 당산동1가 309간 송배수관정비공사	2015.6.9. ~ 2015.12.30	공사업체와 협의 및 교통심의 준비 중	2015년 7월 중
여의도동 33∼46 외 3구간 배급수관 정비공사	2015.5.20. ~ 2015.12.24	공사업체와 협의 및 교통심의 준비 중	2015년 7월 중

◯ 용역공정현황

1. 공 정 율 : 40%(2015.06.22현재)

2. 과업실적 : 현장조사 및 교통영향분석 완료

3. 잔여과업 : 공사업체 협의 후 교통소통대책 수립 및 위원회 심의

▢ 조치계획

◯ 상기 검토사항에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기조치하여 위 용역업무 추진에 만전을 기하고자 합니다.

◯ 준공기한 연기 내용

1. 준공기한 연기 사유 : 용역기간 절대 부족

2. 준공기한 연기 내용

당초 : 2015.03.27. ~ 2015.06.27

변경 : 2015.03.27. ~ 2015.10.31

◯ 연기사유 귀책소재 : 남부수도사업소

◯ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 행정사항

◯ 용역계약업체로 하여금 준공기한 연기 협조요청

따로붙임 : 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.  끝.