투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	전면책임감리용역 계약변경 의뢰(서남권야구장 건립공사 총차 변경 및 8차분 시행)

1. 선종합 2014-305호(2014.02.27)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인「서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역」과 관련하여 총차 계약변경 및 8차분 계약을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서남권야구장 건립공사 전면책임감리용역

나. 계 약 자 : ㈜선엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

다. 총차 계약변경 및 8차분 발주                            (단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
용역기간	총차	2008.12.30 ~ 2014.03.06	2008.12.30 ~ 2015.03.31	390일 연장
	7차	2013.01.26 ~ 2014.03.06		-	준공예정
	8차	2014.03.07 ~ 2014.11.26		-	금차발주
계약금액	총차	5,585,000	7,228,800	1,643,800 증
	7차	1,790,000		-	준공예정
	8차	1,159,000		-	금차 발주

라. 예산과목 : 문화관광디자인본부 체육진흥과, 시민체육 및 국제스포츠진흥발전, 서남권지역돔야구장건립(교통대책포함), 서남권돔야구장건립(도시개발특별회계), 시설비및부대비, 감리비(401-02)

따로붙임  1. 총차 계약변경 및 8차 계약 시행방침 1부.

2. 총차 계약변경 내역서 및 8차분 계약 내역서 각1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	윤용훈		건축총괄과장	강성욱		건축부장	03/06 이병석
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	건축부-2879	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2608	/전송	02)3708-2659	/	yyhun@seoul.go.kr	/	대시민공개