문서번호	도로포장연구센터-970
결재일자	2015.6.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		센터장	품질시험소장
최향숙		백종은	06/22 권영찬
협 조
	주무관			박대근
	주무관			김태우
	주무관			윤진성

도로포장상태 조사·분석 주간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로포장상태 조사·분석 주간보고

【 2015. 6. 22(월). ~ 2015. 6. 28(일).】

□ 주간 실적 및 계획

장비명	조사·분석자	구 분 (세부내용)		조사·분석					비고
				총계획물량	실 적		잔여 물량	금주계획
					전주	누계
합 계		로드스캐너	개소	87	4	28	59	5
			연장(km)	1,776	114.1	883.5	892.5	200
		휴대용GPR	개소	50	6	28	50	-
			연장(m)	2,500	171	16,899	2,500	-
		FWD	개소	65	4	28	50	4
			연장(m)	35,520	7,530 (80점)	27,922 (583점)	10,710	8,610
로드 스캐너	***** (기간제근로자)	3년 주기 전수조사 (2단계-‘15년도)	개소	87	4	28	59	5
			연장(km)	1,776	114.1	883.5	892.5	200
휴대용 GPR	*****	취약지점 (일반 동공·침하)	개소	50	-	-	50	-
			연장(m)	2,500	-	-	2,500	-
		기 타 (도로관리과, 사업소 요청사항 등 )	개소	-	-	28	-	-
			연장(m)	-	-	16,899	-	-
FWD	*****	장기 공용성 평가(LTPP) 구간	개소	23	4	19	4	4
			연장(m)	33,420	7,530 (80점)	24,810 (274점)	8,610	8,610
		지속관리 (2회이상 동공·침하)	개소	42	-	-	42	-
			연장(m)	2,100	-	-	2,100	-
		기 타 (도로관리과, 사업소 요청사항 등)	개소	-	-	9	-	-
			연장(m)	-	-	3,112 (309점)	-	-

□ 특이사항(동공, 침하 등) 및 조치계획

○ 특이사항 발견치 못함

○ 로드스캐너 조사결과 입력 및 자료분석 철저

○ 휴대용 GPR 및 FWD 계획물량 조사·분석 신속히 이행

○ 장비운행 안전강화로 교통사고 예방

붙임 : 1. 도로포장 표면조사·분석 업무일지 【기간제근로자별 각 1부.(주간)】.

2. 도로포장 하부상태 조사일지 2건.  끝.