문서번호	시설관리과-4992
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		소장
김용섭	최재영	이시우		03/06 정운진
협 조

2014년 송배수관 정비사업 추진계획

2014. 3.

동부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 송배수관 정비사업 추진계획

‘14년 송․배수관정비공사 사업대상이 확정되어 본부에서 시달된 바 업무추진 계획을 수립하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

관련근거

배수과-7385(‘13.12.26) : 2014년도 송․배수관정비 대상 선정 통보

배수과- 366(‘14.01.17) : 2014년 송․배수관정비사업 설계기준 교육

정비사업 현황

대상사업 : 2건,   L=770m,   970백만원

연번	공 사 명	공사개요			사업선정 사유	비 고
		구 경 (㎜)	연 장 (m)	소요예산 (백만원)
	소 계 : 2건	400 ~500	770	970
1	장안삼거리~장안동316-15앞 송배수관정비공사	400 ~500	470	570	노후및누수
2	용두동 791번지앞 송배수관 정비공사	500	300	400	노후및누수

교통소통용역 시행

용역설계는 본청 방침에 의하여 타당성 심의 후 추진(기술심사담당관실)

용역설계는 2개의 공사를 통합하여 단일 건으로 발주

용역수행자 : 시설7급 김용섭

담당자 지정

연번	공 사 명	공사개요			담당자	비 고
		구경 (㎜)	연장 (m)	소요예산 (백만원)
	소 계 : 2건	400 ~500	770	970
1	장안삼거리~장안동316-15앞 송배수관정비공사	400 ~500	470	570	시설7급 김용섭
2	용두동 791번지앞 송배수관 정비공사	500	300	400	시설7급 김용섭

공사설계 시 유의사항

현장조사 시점부터 시설관리공단 위탁감독자를 참여시켜 설계방향을 이해하고 현장 감독 업무를 수행할 수 있도록 조치

건설공사 원가계산 개선 사항 반영(계약심사과-890, ‘14.1.14, “건설공사 원가산출 개선품셈 통보)

간선도로에서 공사가 시행되는 점을 감안하여 현장 안전관리(교통유도 시설 및 안전원 등)와 관련된 항목이 누락되지 않도록 반영

단수 수반 시 단수를 최소화 할 수 있도록 일시급수시설 설치 및 제수밸브 조절비 반영

공사 설계 및 시공은 “배급수관 정비사업 지침”에 의거 실시

(누수방지과-3482, ‘13.5.22, “배급수관 정비사업 지침 개정(안) 통보”)

향후 추진계획

- ‘14. 3. 7 ~ 3. 17       공사설계 및 계약심사의뢰

- ‘14. 3. 24 ~ 3. 31      공사발주 및 계약

- ‘14. 4. ~ 6               공사시행

※ 본청 교통처리 심의결과 일정에 따라 공사착공일이 달라 질 수 있음

행정사항

‘14년 상반기에 공사가 완료될 수 있도록 사업추진

별 첨 : 공사위치도 1부.  끝.