서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 검토결과 회신

1. 공사감독2처-7716호(2015.6.12.)와관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 “동호대교 남단 진입램프 개량공사”와 관련하여 가설교량 설치기간이 연장됨에 따라 강재 손료 적용에 대한 검토결과를 회신하오니 공정관리 및 품질관리, 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 가설교량 설치기간 연장에 따른 실정보고 사항을 승인처리 하오니 추후 설계변경시 실물량 정산 반영토록 하시기 바랍니다.

붙임 :  공사 실정보고에 대한 검토결과 보고서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	우창원		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	06/22 이용심
협조자
시행	교량안전과-11219	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1954	/전송	02-2133-1429	/	wcw1000@seoul.go.kr	/	대시민공개