문서번호	설비부-7460
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
유영선		임현근	06/23 박기형
협조

감리용역 기간연장 검토 보고

- 용두3 빗물펌프장 신설 전기공사 감리용역(1차) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

도시기반시설본부

[설 비 부]

감리용역 기간연장 검토 보고

- 용두3 빗물펌프장 신설 전기공사 감리용역(1차) -

우리 본부에서 시행 중인“용두3 빗물펌프장 신설 전기공사 감리용역”과 관련하여 감리원으로부터 감리용역(1차) 계약연장 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고드림.

1. 검토근거

□ ㈜한양티이씨 한양 공 15-062301(2015.06.23.)호

- 용두3빗물펌프장 신설 전기공사 감리용역 계약연장 요청

2. 공사개요

□ 공 사 명 : 중동빗물펌프장 외 2개소 전기공사

- 규    모

․ 중 동 : 수배전반 개량 1,500KVA×2대,

․ 합 정 : 수배전반 개량 2,000KVA×2대,

․ 용두3 : 수전전력 499KVA

□ 공사기간 : 2013.04.15. ~ 2016.04.30.

□ 시 공 사 : ㈜한울전력 대표 유인철

□ 감 리 사 : 중동 및 합정 : ㈜건창기술단 대표 김영규

용두3빗물펌프장 : ㈜한양티이씨 대표 김현득

3. 준공기한 연기 검토

□ 연기사유 : 용두3 빗물펌프장 위치 변경에 따른 재설계 및 토목공사 지장물 이설지연 등으로 인하여 선행공정이 지연되어 후속공정인 전기공사 실 착공이 지연됨에 따라 감리용역이 지연됨.

□ 감리용역기간 조정

차 수	계약금액(원)	계약기간 변경		비고
		당 초	변 경
총 차	38,472,350	‘13.05.20.~‘16.02.28	‘13.05.20.~‘16.02.28	변경 없음
1 차	23,000,000	‘13.05.20.~‘15.06.30	‘13.05.20.~‘15.12.31	184일 연장
장래차	15,472,350

□ 감리원 검토의견

- 용두3 빗물펌프장 위치 변경 재설계 및 토목공사 지장물 이설 등으로 인하여 선행공정이 지연되어 후속공정인 전기공사가 지연됨에 따라 전기감리용역(1차) 계약기간 연장.

□ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4. 보고자 검토의견

□ 감리원의 감리용역 계약기간 연장요청이 타당한 것으로 판단되어 감리용역(1차) 계약기간을 연장하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 감리용역 계약연장 요청 공문 1부.  끝.