투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	『들소사 지붕개량및구조체 보수보강공사』설계변경 시행

1. 시설과–3657(2015.06.19)호와 관련입니다

2. 우리 대공원에서 시행중인“들소사 지붕개량및구조체 보수보강공사”와 관련하여 설계변경 시행코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 들소사 지붕개량및구조체 보수보강공사

나. 공사금액 : 금99,400,000원

다. 공사기간 : 2015. 04. 28. ~ 2015. 06. 28

라. 계 약 자 : ㈜신림종합조경 대표 정상훈

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
도 급 비	88,049,000	99,400,000	증 11,351,000
공사기간	2015. 04. 28. ~ 2015. 06. 28	2015. 04. 28. ~ 2015. 06. 28	변동없음

바. 설계변경 사유 : 공사물량 증·감및제경비 정산 등

붙임 : 1. 실정보고에 따른 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 실정보고서 제출 1부. 끝.

	서울대공원장
주무관	이상국		★시설과장	공헌구		관리부장	심상원		서울대공원장	06/23 송천헌
협조자	총무과장	이경로
시행	시설과-3703	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7410	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개