문서번호	기전과-4275
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
차준원		06/23 최주용
협조
	주무관		이명호

「2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연)」

작업기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

성동도로사업소

(기 전 과)

「2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연)」

작업기한 연기 검토보고

『2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)-1,2구역』 추진중 민원 및 공사물량 변경으로 교통신호기(연간단가) 공사에 대하여 아래와 같이 공사기간을 연기하고자 합니다.

Ⅰ

공사개요

공 사 명	2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)- 제1차 작업지시
	1구역	2구역
공사위치	한진타운아파트(보) 외 5개소	무궁화약국(경보) 외 24개소
공사내용	제어기 교체 및 지주교체외 기타1식	횡단보도 신설 외 기타 1식
시공사	영진전기소방설비공사	대현전력(주)
공사기간	2015. 3. 27 ~ 2015. 6. 26
감 리 사	대영유비텍(주) 책임감리원 강광환

Ⅱ

준공기한 연기요청

○ 관련근거

-대영유비텍(주) 대영전기감15A-06-11호, 대영전기감15A-06.12호(2015.06.22.)

○ 연기요청내용

구 분	공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경
2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)-1,2구역	2015.03.27. ~ 2015. 06.26	2015.03.27. ~ 2015.08.13

○ 감리단 검토내용

- 공사중 민원발생 및 공사물량 변경으로 인한 자재입고 지연으로 공사기간        연장함이 적합함.

○ 예산과목

- 2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)-1,2구역

: 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전 시설물 관리,

교통신호기 신설 및 보수, 시설비(401-01)

Ⅲ

보고자 의견

- 감리단 검토의견과 같이 민원 발생 및 공사물량 변경으로 인한 자재입고 지연으로 공기부족, 2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가-1,2구역)-제1차 작업지시에 대하여 작업기한을 연기하여 공사추진에 철저를 기하고자 합니다.

붙    임 : 1. 감리단 검토의견서 2부. 끝.