문서번호	기전과-6125
결재일자	2015.6.23.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강운규		조태욱	06/23 이영목
협조
	관리단속과장		정수현

「2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역」

설 계 변 경 보 고[1차]

2015. 6

북부도로사업소

기전과

「2015년 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 유지보수용역」

설 계 변 경 보 고[1차]

우리사업소 터널 및 지하차도 재난발생시 긴급방송 및 공중파방송의 중계를 위한 라디오 재방송설비 유지보수 용역이 계약내역 대비 감 변동되어 이를 검토하고 보고함.

관련근거

❍ 2015. 02. 13. 2015년 터널 및 지하차도 재방송설비 유지관리용역 계약

❍ 2015. 02. 26. 창동,녹천지하차도 라디오 재방송설비 유지관리 계획

- 「도로터널 방재시설 설치및관리지침」에서 권장하는 시설(200m)이하

용역 개요

❍ 용 역 명 : 2015년 터널 및 지하차도 재방송설비 유지관리용역

❍ 용역업체 : 동화전자산업**********

❍ 용역기간 : 2015. 3. 1 ~ 2015. 12. 31.

❍ 계약금액 : 금18,098,000원(금일천팔백구만팔천원)

변경 사유

❍ 계약대비 용역점검개소 감소(8개소 → 6개소)

연번	시설명	터널·차도 연장(M)	제조사	설치일자	설치채널	비고
1	북악터널	***	****	*****	******
2	구기터널	***	****	*****	******
3	자하문터널	***	****	*****	******
4	동망봉터널	***	****	*****	******
5	삼청터널	***	****	*****	******
6	공릉터널	***	****	*****	******
7	창동지하차도	***	****	*****	******	용역대상제외
8	녹천지하차도	***	****	*****	******	용역대상제외

❍ 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증 감		비 고
총 용 역 비	18,098,000	13,573,500	- 4,524,500	(감)
공 급 가 액	16,452,727	12,339,545	- 4,113,182	(감)
부가가치세	1,645,273	1,233,955	- 411,318	(감)

검토의견 및 조치계획

❍ 위와 같이 접수된 설계변경(제1차)에 대해 검토한 결과 창동, 녹천지하차도

라디오 재방송설비의 송출중단에도 민원사항이 없으며, 「도로터널 방재시설 설치및

관리지침」에서 권장하는 시설(200m)이하로 용역점검대상에서 제외 승인처리코자

합니다.

붙임 : 1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.