문서번호	전산정보과-5721
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장	상수도사업본부부본부장
오지현	홍동섭	이성규	06/23 고인석
협 조
	기획예산과장			최생인
	재무회계과장			조두업

안정적인 정보시스템 운영을 위한

전산실 노후 스토리지 교체 계획

2015. 6

요금관리부

(전산정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

안정적인 정보시스템 운영을 위한

전산실 노후 스토리지 교체 계획

행정정보시스템의 데이터 저장장치인 스토리지 중 내용연수(6년)이 경과되고 노후화된 스토리지를 교체하여 안정적인 정보시스템 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		스토리지 운영현황 및 필요성

스토리지 운영현황

(단위:백만원)

No	모델명	도입년월	도입가	용량	용 도	비 고
1	USP-V	’09.03	402	24TB	행정망 통합스토리지(요금,고객,GIS등)
2	T9980V	’06.11	399	24TB	행정망 백업스토리지(복제 및 복구용)	교체대상
3	USP	’06.11	167	12TB	원격지(데이타센터) 복제스토리지
4	AMS1000	’08.03	103	9TB	인터넷망 통합스토리지(홈페이지 등)
5	DS4800	’06.09	86	5TB	경영자정보 스토리지

필요성

▶ 내구연한(6년) 경과 및 EOS(End Of Service, ‘15. 3.31)기간 만료등 장비 노후화로 교체 필요

※ 동일년도에 구입한 UPS 및 DS4800은 단독시스템에 연동되어 운영중으로 서버 교체시 함께 교체 예정

Ⅱ		추진방향

시스템의 효율적 운영을 위해 시스템 구성 변경

- 행정망 통합 스토리지 : 신규 구매스토리지 (고사양, 고용량)

- 행정망 백업 스토리지 : 현재 운영중인 행정망 통합스토리지로 변경운영

Ⅲ		추진개요

사 업 명 : 전산실 노후 스토리지 교체

사업기간 : 2015. 6. ~ 9.

소요예산 : 240,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 등, 자산취득비

계약방법 : 제한경쟁입찰(적격심사)

사업내용

- 내구연한이 경과되어 노후화된 스토리지 교체용 구매 및 설치 (Usable 40TB이상)

- 스토지리 복제 및 원격지 복제 솔류선 구매 (복제 가능 용량 : 26TB이상)

- 현 운영스토리지에서 데이터 이관 및 정합성 테스트

- 효율적 운영을 위한 스토리지 구성도 변경

· 백업시스템으로 운영중인 스토리지 폐기, 현 통합스토리지를 백업스토리지로 활용

· 통합스토리지는 高용량, 高사양인 신규 스토리지 활용

시스템 구성도

추진일정

- 과업지시서 검토 및 계약심사(시 계약심사과) 의뢰 : 7월중

- 사업발주 및 계약 체결 : 7 ~ 8월중

- 스토리지 구매 및 설치 : 9월중

- 성능테스트 및 검수처리 : 9월중

Ⅳ		기대효과

IT기술의 발달로 고사양 장비 소형화로 인한 시스템실 공간 확보 및 장비도입가격 인하로 연간 유지보수 비용 절감 (유지보수 요율 : 장비 도입가 * 8%)

구분	교체 전	교체 후	비고
크기	2랙	1랙	△1랙(60*90*210cm)
연 유지보수 비용	28,857천원	19,200천원	△9,657천원

현재 통합스토리지로 운영중인 스토리지 공간의 부족으로 용량증설이 필요하나 스토리지 구성 변경으로 인한 별도 용량 증설 불필요 및 업무 처리속도 향상 기대

구분	현 통합스토리지 (USP-V)	신규 스토리지	비고
디스크 공간	Usable 24TB	Usable 40TB 이상	현 20TB 사용중
메 모 리	캐쉬 44GB	캐쉬 120GB 이상	캐쉬증가로 처리속도 향상

Ⅳ		행정사항

스토리지 교체 대상 장비에 대한 자료조사 및 사업발주 준비

과업지시서 검토요청(시 정보기획담당관), 계약심사 의뢰(시 계약심사과) 등 사전 발주 업무처리