문서번호	조경과-3357
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	조경과장
강명희	김효준	06/23 代강금완
협 조	총무과장		이경로
	주무관		이상균

친환경 체험전시장 외부 공간 정비 계획

2015. 6.

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

친환경 체험전시장 외부 공간 정비 계획

노후된 조형물과 불규칙한 식물 식재로 관람객에게 매력적인 공간으로 인식되지 못하는 친환경 체험전시장의 외부공간을 정비하여 서울대공원의 이미지 제고에 기여하고자 함.

Ⅰ	대상지 현황

□ 위    치 : 친환경 체험전시장 외부(서울대공원 주출입문 좌측)

□ 면    적 : 489㎡

□ 이용현황 : 꽃묘 및 작물 식재지

□ 문 제 점

❍ 서울대공원의 주출입로에 위치해 있으나 노후된 조형물의 존치ㆍ특화되지 않은 꽃묘 등이 식재되어 관람객의 시선확보가 어려움

❍ 친환경 체험전시장 운영에 따른 부차적인 공간이나 계절꽃 위주의 식재ㆍ관리로 체험전시장의 기본 운영 방향에 부합하지 않음

□ 현황사진

친환형 체험전시장 외부 현황		조형물 현황

Ⅱ		정비 개요

□ 기    간 : 6. 23. ~ 6. 30.

□ 방    향

❍ 기 식재된 기념수 등 수목을 중심으로 대상지를 세 개의 공간으로 구분하고 공간에 통일성을 부여하되 디자인적 요소를 가미하여 정비

❍ 식재 식물의 생육 특성 및 관람 효율성 증진을 위해 공간 내 구획 간 목재패널 설치

❍ 정비 공간의 주제를 부여하는 “도시농부텃밭” 조형물 설치

□ 내용 및 방법 : 대상지 정비 후 물품 구매 및 설치

❍ 대상지 정비 : 서울대공원 인력 및 장비를 사용한 자체 정비

❍ 물품 구매 : 수의계약

- 구매내용 : 목재패널 234개 및 지지대 34개

- 구매업체 : 가든링크(경기도 수원시 장안구 장안로 199 대표 : 최동훈)

❍ 물품 설치

- 목재패널 : 수의계약을 통해 구매한 물품 업체의 직접 설치

- 조 형 물 : 기 계약된 식물전시공간연출용역 업체의 직접 설치

□ 정비안

	목재패널 설치(안)
전체 도면	조형물 설치(안)

Ⅲ		소요예산

□ 소 요 액 : 12,600천원

❍ 목재패널 및 지지대 구매ㆍ설치----12,600천원

□ 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 식물원 및 동물사 조경관리, 재료비, 재료비

Ⅳ		향후계획

□ 2015. 06. 22. : 대상지 정비 및 조형물 철거

□ 2015. 06. 24. : 수의계약

□ 2015. 06. 25. : 목재패널 및 조형물 설치

□ 2015. 06. 30. : 설치 완료.  끝.