투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	용역준공기한 연기 요청(북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업)

1.  시설과-1989(2015.03.20.)호 및 공원운영과-5657(2015.03.30.)호와 관련입니다.

2. 『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』실시설계용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

- 용 역 명 : 『북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업』실시설계용역

- 용역기간 : 2015.03.27.~2015.06.24

- 도 급 액 : 금20,710,000원

- 도 급 자 : PnJ건축사사무소 대표 정현주

나. 준공기한 연기

용 역 명	계약일	착수일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
북서울꿈의숲 아트센터 시민휴게공간 확충사업	2015.03.27	2015.03.27	2015.06.24	2015.07.24

다. 연기사유 : 도시공원위원회 심의 결과 미통보 및 공용건축물 협의에 따른 추가기간 필요

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	전지연		시설팀장	한종수		시설과장	06/23 이종한
협조자
시행	시설과-4444	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/		/	부분공개(5)