문서번호	환경과-3117
결재일자	2015.6.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
이창학		이철범	06/23 송대식
협조	여의도안내센터장		박재영
	주무관		한미라

미니스톱여의도2호점 앞 차량형 화장실 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

환 경 과

미니스톱여의도2호점 앞 차량형화장실 설치

미니스톱여의도2호점 앞은 이동형화장실이 2동설치되어 있으나 주말과 휴일 행사시에 여성화장실이 부족하여 50분씩 줄을서서 기다리는 불편 민원이 있어, 여성전용화장실을 설치하여 한강이용 시민의 불편함을 해소하고 시민만족도 향상에 기여하고자 함.

□ 주변 현황

❍ 주변여건 : 한강공원 진입여건이 좋고 산책로, 넓은공원, 체육시설 레저시설, 등을 이용하는 시민이 많은 지역임

❍ 화장실현황 : 하류 마포대교 물빚광장분수 앞 이동형 화장실 2동 기설치

현위치(미니스톱여의도2호점 앞)에 이동형 화장실 2동 기설치

상류 여의도안내센터  화장실 2동 기설치

❍ 화장실 이용여건

- 비수기, 평일에는 기 설치된 화장실 이용에 불편이 없으나

- 성수기 주말, 공휴일에는 이용객 증가로 대기시간이 길고 화장실이 멀리 떨어져 불편 (상류400m, 하류화장실395m)

□ 차량형 화장실 설치 계획

❍ 기    간 : 2015. 6. 25. ~ 7. 05.

❍ 위    치 : 미니스토여의도2호점 앞

❍ 유    형 : 차량형 화장실 1동(여성전용)설치

- 좌변기 7개(여자7), 세면기 2개

❍ 설치내용

- 상・하수도 배관 및 전기시설, 콘크리트 기초공사 등

- 차량형 화장실 설치(기존 강서안내센터 차량형화장실 이동설치)

- 이동식 화장실 리모델링 (내부바닥 타일교체, 벽면교체, 큐비클교체,

변기교체, 상수도배관교체, 하수도 배관교체, 전기등교체,외부도색,

내부방수, 세면기교체, 차량형발판보수, 차량형자키수리 등)

❍ 소요예산 : 20백만원(토목공사, 배관 및 전기공사 8, 리모델링 12)

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 둔치및화장실청소, 사무관리비

- 계약방법 : 수의계약(소액으로 주변 매설상태를 인지한 업체와 계약)

<이동식 화장실 설치 장소>

화장실 설치예정지

□ 행정사항

❍ 화장실 설치 후 유지관리(여의도안내센터)