투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 의뢰(LED 실내조명등 구매)

1. 우리 사업소에서 시행 중인 『옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사(전기)』에 소요되는 관급자재에 대하여, 아래와 같이 납품 연기를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건   명 : LED 실내조명등 구매

나. 연기내용

품명	납품요구번호	계약금액			납품기한		계약업체	비고
		품계대	수수료	합계금액	변경전	변경후
LED 실내 조명등	12-14-2-60910-00	18,942,000	97,170	19,039,170	2015.06.30.	2015.09.20.	㈜파인테크닉스	3자단가

다. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연으로 전기공사 공사지연으로 인한 관급자재 설치시기 미도래

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙   임: 1. 준공기한 연기보고 1부.

2. 분할납품요구 및 통지 1부.

3. 납품연장합의서 1부. 끝.

	기전과장
주무관	신대중		주무관	문준호		기전과장	06/24 최주용
협조자
시행	기전과-4313	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250-14 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개