투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행- 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

우리사업소에서 시행중인 『2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2015년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2015. 03. 03. ~ 2015. 12. 31.

3. 도 급 비 : 359,018,200원

4. 도 급 자 : 홍기건설산업(주) 대표 안순배

5. 설계변경내역

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	687,341,520	779,317,000	증) 91,975,480
도 급 비	359,018,200	446,352,730	증) 87,334,530
관급자재비	328,323,320	332,964,270	증) 4,640,950

6. 설계변경사유 : 붙임 설계변경 검토보고서 참조

7. 예산과목

가. 교통운영과, 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 노면표지선 도색 및 제거, 시설비 (687,341,520원)

나. 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 교통환경 개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비 (91,975,480원)

붙 임 : 1. 설계변경(제1회) 검토보고서 1부.

2. 변경설계서 및 내역서(제1회) 1부.  끝.

주무관	권세봉		도로보수과장	이규철		서부도로사업소장	06/24 임대성
협조자	주무관	이상하		주무관	홍용현		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-6199	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8359	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개