문서번호	시설관리과-16520
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		소장
김재영	최재영	오기석		06/24 이재덕
협 조

2015년 동대문구 관내 단위공사

건설폐기물 처리용역 추가 발주계획

2015.6.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2015년 동대문구 관내 건설폐기물 처리용역 발주계획

우리사업소에서 시행중에 있는 “2015년 동대문구 관내 상수도공사(단위공사)  건설폐기물 처리용역의 계약금액이 소진이 예상되어, 2015년 건설폐기물 용역을 추가 발주 시행함으로써 공사 시행시 건설폐기물 처리에 만전을 기하고자 함.

▢ 발주현황

○ 용 역 명 : 2015년 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물처리용역

○ 용역개요 : 폐기물운반 1,303㎥, 폐기물처리 3,042톤

○ 용역기간 : 계약일로부터 2015.12.30까지

○ 총용역비 : 금31,129,000원

▢ 보고내용

○ 2015년 동대문구 상수도공사(단위공사)의 폐기물 물량 증가(폐콘크리트, 폐토석)로 인해 폐기물 처리용역의 계약금액의 소진이 예상되어, 금년도 시행 예정인 상수도공사(단위공사)의 원할한 공사 진행을 위하여 2015년 건설폐기물처리용역 폐콘리트, 폐토석 추가 발주가 필요한 실정임.

[발주근거 : 공사감독2처-6909호(’15.6.3.) 및 공사감독2처-8219호(‘15.6.18)]

○ 폐기물 추가 발생량 조사(폐콘크리트, 폐토석)

공 사 명	당 초		변 경 (추가 발생 예정물량)		증, 감(추가발주내역)
	폐콘크리트	폐 토 석	폐콘크리트	폐 토 석	폐콘크리트	폐 토 석
소 계	25㎥	25㎥	225㎥	600㎥	증 200㎥	증 575㎥
장안동 369-1~430-4호외 1개소 배급수관 정비공사	20㎥	20㎥	55㎥	600㎥	35㎥	580㎥
용두동 39번지외 3개소 배급수관 정비공사	5㎥	5㎥	80㎥	-	75㎥	-5㎥
배봉초교사거리~보호관찰소간 배수관 정비공사	-	-	90㎥	-	90㎥	-
용두역 주변 송배수관 정비공사	-	-	-	-	-	-

▢ 조치의견

○ 2015년 건설폐기물 처리용역을 폐콘리트, 폐토석 등 추가 발주(용역기간 : 계약일로부터 2015.12.30까지)하여 동대문구 관내 상수도공사(단위공사)의 건설폐기물 처리업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.