투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청[옥수,금호터널 보도차단벽설치공사(전기, 통신)]

1. 기전과-4252호(2015.06.22.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『옥수·금호터널 보초차단벽 설치공사(전기, 통신)』에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한 연기) 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

공 사 명	옥수·금호터널 보도차단벽설치공사 (전기)-1차	옥수·금호터널 보도차단벽설치공사 (통신)-1차
계 약 자	㈜현준이엔씨 조현주	㈜화인전설 이순희
공사기간	2014.12.23.~2015.06.30.	2014.12.23.~2015.06.30.
계약금액	47,958,500원(변경없음)	87,000,000원(변경없음)

나. 연기귀책사유 : 선행공정(토목) 지연으로 공사시기 미도래

다. 공사기간 연기

- 변경전 : 2014.12.23.~2015.06.30.

- 변경후 : 2014.12.23.~2015.09.20.

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 예산과목 : 도로시설관리, 터널시설관리, 옥수금호터널 보차도차단벽설치, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙     임 : 1. 준공기한 연기 보고 1부.

2. 준공연장합의서 각 1부. 끝.

	기전과장
주무관	신대중		주무관	문준호		기전과장	06/24 최주용
협조자
시행	기전과-4312	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250-14 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개