문서번호	시설관리과-1838
결재일자	2015.6.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		한강사업본부장
유충현	박희철	차광재		06/25 고홍석
협 조
	총무과장		최대봉
	주무관		오상협

공사 설계변경 시행 보고(제1회)

-‘15 하천시설유지관리 및 개선(연간단가) -

2015. 6

한강사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

공사 설계변경 시행보고(제1회)

《 ‘15년 하천시설유지관리 및 개선공사 (연간단가) 》

‘15년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)와 관련하여 본부장방침 반영 및 긴급 시설물 보수 등으로 도급비 증가(캠핑장) 및 계약물량 변경되어 설계변경 시행코자 함

공사개요

❍ 공사위치 : 한강공원내 전지역(공원내 각종시설물 등)

❍ 공사규모

- 호안브럭정비 100㎡, 경계석설치 2,200m, 하수관정비 230m, 포장 50a

- 차선도색 12,500m, 인공암벽장 설치 1개소 등

❍ 공 사 비 : 1,370,000천원 (도급비 955,688천원)

❍ 공사기간 :‘15. 4. 1 ~ ‘15. 12. 31

❍ 시 공 사 : ㈜승일토건 대표 박영온

관련근거

❍ 시설관리과-849(‘15.4.1)환경순찰, 다산콜민원, 센터 보수요청(잠실, 여의도, 뚝섬센터)

- 경계석파손, 수도관누수, 오수관파손, 과속방지턱 파손 등

❍ 시설관리과-854(‘15.4.2)현장조사및조치계획보고(뚝섬, 이촌, 망원, 강서센터)

- 화강석파손, 수도관누수, 난간파손, 포장소파, 맨홀인상 등

❍ 시설관리과-1178(‘15.5.1)대중교통접근 노선구간 정비(잠원센터 - 본부장방침)

- 선착장앞 버스회차로설치, 진입금지 볼라드설치, 아스팔트포장 등

❍ 시설관리과-962(‘15.4.13)120민원, 센터, 민원 등 (여의도 등 7)

- 계단식생메트설치, 볼라드, 수도관파손, 안전시설 등

❍ 시설관리과-1232(‘14.5.7)한강대교옆 한강공원 진입로 확장(양화센터)

- 한강공원 진입로개선(확장)당초 2.0m → 4.0m, 연장 65m

❍ 시설관리과-1289(‘14.5.13)반포공원 보도파손구간 정비(반포센터)

- 물방울놀이터 전후 보도구간을 잔디브럭설치 등

❍ 시설관리과-1355(‘14.5.19)중랑천교 손상된 데크파손 및 도로침하(이촌~뚝섬간)

- 교량상 데크파손 제작설치 250개소, 두모교하부 도로침하 파손 30㎡보수

❍ 시설관리과-1360(‘15.5.20)환경순찰, 다산콜민원, 센터 보수요청(뚝섬, 망원, 난지, 잠원)

- 안내판, 산책로파손, 차량차단기, 수도관파손, 반사경 설치 등

❍ 시설관리과-1429(‘15.5.26)대중교통 접근성개선구간 정비(난지센터 - 본부장방침)

- 공원내 진입로 버스+일반차량→버스만 진입토록개선, 보도및 탄력봉 설치, 일반차량 별도진입토록 유도 등

❍ 시설관리과-1689(‘15.6.15)환경순찰, 센터 보수요청(여의도, 강서센터)

- 여의도 물빛광장 보행데크파손, 강서공원내 침수시 시설물 이전구간 정비 등

설계변경 사유

❍ 작업지시(1~10차)된 본부장방침 및 센터별 시설물점검, 환경순찰 지적사항, 민원발생 등에 대한 긴급 보수 ․ 복구 등 신규대가 및 계약물량정산 반영 등에 따른 설계변경

❍ ‘15년 한강여름캠핑장 운영계획(본부장 방침 운영과-3427호,‘15.5.27) 과 관련하여 캠핑장운영에 필요한 시설물 설치(식수대, 상 ․ 하수시설 등)

- 공사내용 : 한강몽땅 캠핑장 및 수상행사용 샤워실, 화장실, 음수대와 연결되는 상수관 및 오수관 설치

- 공사규모 : 식수대 2개소, 상수관 27개소 (신규9개소), 오수관 27개소(신규9개소)

☞ 가압 펌프시설 설치 3개소 오수관로(∅ 250mm) 435m설치

- 기 타 : 행사장 진입로 및 배수로등 개선 협조요청시 시설 보완

❍ 주요 변경내용

공 종	단위	물 량			금 액(천원)
		당초	변경	증 ․ 감
호안브럭정비	㎡	120	330	210	증) 890
도로경계석 설치	m	2,220	1,510	-710	감) 47,338
흄관부설(∅300~600)	m	320	140	-180	감) 3,416
아스팔트포장(평삭)	a	5	25	20	증) 19,458
소형고압브럭포장	a	4	2	-2	감) 3,187
데크설치(합성목재)	㎡	-	276	276	증) 26,363
잔디브럭설치	a	-	8	6	증) 16,990
보강토옹벽설치(H2.5m)	㎡	-	75	75	증) 22,602
차선도색	m	12,500	11,900	-600	감) 1,448
관목이설(1.2m)	주	-	1,035	1,035	증) 13,944
상수도공사(∅50~100)	m	950	340	-610	감) 6,687
차량단속기 설치	1개소	-	1	1	증) 7,000
사급자재	1식	-			증) 15,887

설계변경 내역

❍ 설계변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	1,205,688,000	1,285,688,000	증) 80,000,000
도 급 비	955,688,000	1,035,688,000	증) 80,000,000
관 급 비	200,000,000	200,000,000	-
이 설 비	50,000,000	50,000,000	-	․ 폐기물용역

조치의견

❍ 상기와 같은 내용으로 설계변경하고 캠핑장 시설물 설치운영에 소요되는 예산은 운영과(상하수도 식수대설치)에서 확보된 예산(80백만원)범위내에서 도급액에 포함 사용될 수 있도록 설계변경하여 공사시행에 만전을 기하고자 함

첨   부 : 1) 본부장 방침서 각 1부.

2) 변경내역서 1부.   끝.