문서번호	건축부-7220
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
정제국		강성욱	전결 06/25 김우성
협조
	경리과장		代김용범

- 옛시장공관리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사 -

흰개미 발생에 따른 전문가 자문결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(건 축 부)

- 옛시장공관리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사 -

흰개미 발생에 따른 전문가 자문결과 보고

옛시장공관 리모델링 공사 과정에서 확인된 흰개미 방충을 위한 외부전문가 자문결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

Ⅰ				자문 개요

○ 자문명 : 옛시장공관리모델링공사 흰개미 방충계획 수립을 위한 외부전문가 자문

○ 추진경위 :

- 2014.11.06.   사업의뢰(한양도성도감 → 건축부)

- 2015.01.05.   공사착수

- 2015.06.19.   흰개미 발생에 따른 실정보고 접수(시공자 → 건축부)

- 2015.06.23.   흰개미 방충전문가 자문실시

○ 일시/장소 : 2015.06.23.(화) 13:00 ~ 17:00 / 옛 시장공관 리모델링 공사현장

○ 자문위원 :

연번	성명	소속	경력	비고
1	이동흡	(사)한국목조건축협회	(전)산림청 국립산림과학원 임업연구관 2014 운현궁보수공사 기술지도 위원 (현)한국목조건축협회 이사

○ 자문사진

Ⅱ				자문 내용 요약

○ 피해유형

- 일본흰개미의 피해로 추정됨

- 토양과 인접한 토대·기둥, 화장실, 부엌 등 물을 사용하는 공간과 2층 누수부분에서 피해가 확인됨

○ 방제방법

- 우드키퍼네이쳐를 기초주변 30cm 범위에서 깊이 20~30cm 정도로 토양처리

주식회사 한켐의 목재 방부방충 제품명

- 토대용 목재 및 기둥은 방부처리 목재 사용환경 구분 H4의 목재로 교체

국립산림과학원 고시 제2011-4호『목재의 방부·방충 처리기준

- H4사용환경 : 토양 또는 담수와 접하는 곳 등에 사용되는 목재로 부후·흰개미 피해의 우려가 있는 곳에서 고도의 내구성이 요구되는 조건』

- 재사용 부재는 목재에 작은 구멍을 뚫고 우드키퍼네이쳐를 내부까지 분사처리하고 표면은 약제를 분사처리

※ 자문의견서 원본 별첨 참조

Ⅲ				검토 및 처리의견

○ 흰개미 서식 및 이로 인한 피해가 확인되었고, 리모델링공사 이후에도 목재에 대한 피해가 예상되는 바, 공사관계자와 협의하여 자문의견에 따른 방제방법을 공사내용에 반영하고,

- 방충계획 수립 전까지 목공사(보수공사 포함) 시행 보류

- 감리자 : 방충에 대한 시공기준(공사시방서) 및 공사대가 산출

- 시공자 : 방충이 필요한 목재수량 파악 및 시공계획서 작성

- 구조자문 등에 따라 추진중인 설계변경 내역 중 기타공사 토양처리 내역은 상기 토양처리 방법으로 대체 추진

○ 방제에 따른 추가 공사비용이 발생할 경우 주관부서와 협의하여 추가예산반영 또는 공사내역 조정 여부를 결정코자 합니다.

재배정예산	원인행위액	품의가능액	비고
1,459,266천원	1,214,756천원	244,510천원	건축부 배정예산 기준

Ⅳ				행정사항

○ 자문수당 지급

- 지급대상 : 이동흡 자문위원

- 소요예산 : 170,000원

· 산출방법 : 340,765 × 4/8일 = 170,000원(1,000원 미만 절사)

· 산출근거 : 2015년 엔지니어링기술자 노임단가(기술사) : 340,765원 / 1일

- 지출방법 : 개인별 은행계좌 입금

- 예산과목 : 부서)한양도성도감 정책)한양도성 보전 관리활용 단위)한양도성보존정비, 세부)한양도성 탐방안내센터 확보, 편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설부대비

○ 향후계획

- 2015.06.        방충계획 확정(공사대가, 공사범위, 시공방법 등)

- 2015.07.        방충공사 시행

- 2015.07.        설계변경 승인 및 계약금액 조정

- 2015.11.        시설물인계인수

붙임문서 : 자문의견서 – 1부.  끝.