문서번호	시설관리과-14121
결재일자	2015.6.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		최희권	06/25 우종근
협조

상수도 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

【신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도시설 이설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

상수도 이설 착공계 제출에 따른 검토보고

【신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도시설 이설공사】

신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 조합********신길11 재정비촉진구역 주택재개발사업**********************************

관련근거

두양 2015-06-4호(2015.6.19.)호와 관련임.

*신길11 재정비촉진구역 주택재개발사업 중 상수관이설공사 착공계 제출*

******

********** 신길11 재정비촉진구역 주택재개발사업 **************

공사위치 : 신길동 263-5 ~ 261-12앞(관경 : 200mm)

공사기간 : '14. 11. 05. ~ ‘15. 12. 31.

이설일자 : '15. 06. 25 ~ '15. 06. 30(주간)

이설개요 : D=200mm  L=90m

(※ 퇴수변 D=80mm× 1개소 신설 포함)

단수일시 : ‘15. 6. 26(금) 오후 14:00 ~ 오후 15:00(1시간)

단수세대 : 3세대

시공회사 : ㈜두양종합건설  대표이사  김병주

단수계획

연번	단 수 위 치	단수예정일	단수예정시간	단수세대	작업일수
1	신길동 329 일대 (D=300×200mm 연결 시)	6월26일(금)	오후 14:00 ~ 15:00(1시간)	3세대	1일

단수세대 급수방안

현장 확인결과 위 단수세대 건물은 3세대이며, 사전 공사 관련 홍보 및 협의를 통해 주간공사를 신속히 시행하여 급수불편을 최소화 함.

(단수시간 : 1시간)

홍보계획

단수안내문 배포 및 부착((주)두양종합건설)

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사 1일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

홈페이지 단수안내 게재

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내(남부수도사업소)

민원발생이 많은 영업집 단수안내((주)두양종합건설)

- 음식점, 교회 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접방문하여   단수안내문을 전달하고 사유를 설명.

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 물탱크 등에 받아 충분히 사용토록 안내.

급수차지원(남부수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차 지원요청시 남부수도사업소 보유 급수차로 수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

공사 관계자 비상연락처

구 분	성 명	연 락 처
시공회사	********** **************	********
현장대리인	*****	*************
현장소장	*****	*************
상수도관리	**********	*********
	****************	************

시공참여자

연번	업 무	성 명	주민등록번호	주 소	자격사항
*	현장대리인	김종국	**************	경기도 시흥시 거모동1776-15 한마음맨션202동202호	토목고급
*	배관공	신인식	**************	서울시 송파구 송파동 86-18	토목초급
*	배관공	박준문	**************	서울시 구로구 가리봉동136-26	공업배관
*	배관공	오원복	**************	서울시 영등포구 대방천로6가길9
*	배관공	이윤형	**************	서울시 은평구 수색동149-4
*	배관공	고삼영	**************	경기도 성남시 중원구 금광동1351

검토 및 처리의견

영등포구청 도로과는 (주)두양종합건설이 단수 홍보계획에 따라 홍보를 차질 없이 진행할 수 있도록 관리 감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치

계획된 시간내에 배수관로 연결작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고, 단수시간이 최소화 되도록 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

조치의견

본 계획을 (주)두양종합건설에 통보하여 상수도시설 이설공사와 관련하여 단수작업 및 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함

첨 부 :  1. 시공계획서(이설배관도, 착공계, 현장대리인 신고서 등) 1부.

2. 단수안내문 각1부.

3. 상수도관 이설승인조건 1부.  끝.