문서번호	물관리정책과-10553
결재일자	2015.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물관리정책과장
김성영		윤맹진	06/25 배광환
협조
	담당자		이새봄

2015년 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질·유량 모니터링 용역 계약변경 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

- 2015년 수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 -

수질․유량 모니터링 용역 계약변경 계획

	수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질·유량 모니터링 용역과 관련하여 물재생센터 방류수에 대한 수질측정 횟수를 늘려 방류수 수질관리 및 총량관리 시행계획 년도별 이행평가에 대비하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 2015년  수질오염총량관리 배출 및 삭감시설 수질·유량 모니터링 용역

□ 용역기간 : 2015. 3. 19～2015. 12. 10

□ 조사지점

□ 서울시 관할 공공하수처리시설(물재생센터) 4개소, 9개 지점

□ 오수처리시설(1일 방류량 700㎥/일 이상) 1개소, 1개 지점

□ 산업폐수배출시설(1일 폐수배출량 700㎥/일 이상) 4개소, 4개 지점

□ 비점저감시설(강우시 가동시설) 2개소, 2개 지점

□ 계약금액 : 42,415,300원

□ 계약업체 : 자연종합환경(주)

□ 계약방법 : 전자공개수의계약(총액)

□ 예산과목 : 도시안전본부, 물관리정책과, 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 수질오염총량관리사업, 연구용역비

Ⅱ		변경사항

□ 계약금액

구분	당초	변경	비고
금액	42,415,300원	47,089,700원	증)4,674,400원

□ 측정횟수

구분	당초		변경		비고
	조사지점	측정 총횟수	조사지점	측정 총횟수
공공하수처리시설 (500톤/일 초과)	9개소	270회	9개소	308회	증) 38회
오수처리시설 (700㎥/일 이상)	1개소	12회	1개소	12회
산업폐수배출시설 (700㎥/일 이상)	4개소	48회	4개소	48회
비점저감시설 (누적용량 10,000㎥ 이상)	1개소	36회	1개소	36회
비점저감시설 (누적용량 10,000㎥ 미만)	1개소	18회	1개소	18회

Ⅲ		추진일정

□ 계약변경 의뢰 : 2015.6월

□ 공공하수처리시설 방류수 수질측정 추가 실시 : 2015. 7 ∼11월

붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝.