투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	(감액)변경계약 체결 알림-3,4처리장 초침 포기배관 교체 공사

물재생과-4120(2015.06.24)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 3,4처리장 초침 포기배관 교체 공사

나. 계약금액 : 감 금14,593,000원(금일천사백오십구만삼천원)

- 변 경 : 금93,192,000원(금구천삼백일십구만이천원)

- 당 초 : 금107,785,000원(금일억칠백칠십팔만오천원)

다.  변경사유 : 신공종 발생 및 수량증감 반영

라. 계 약 일 : 2015년  04월  22일 (변경계약일 : 2015년 06월 24일)

마. 착 공 일 : 2015년  04월  27일

바. 준공기한 : 2015년  06월  25일

사. 계약업체 : ㈜건동엔지니어링 (대표 유경숙)

(☎ 02-745-2056)

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	정은경		관리과장	김홍덕		중랑물재생센터소장	06/25 김동기
협조자
시행	관리과-8438	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)