투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 준공기한 연기 의뢰(전체제3회,4차제2회,5차제1회)

『구리암사대교 연결도로 건설공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

2. 공사개요 : 도로개설 B=31.5m, L=1,88km

3. 도 급 자 : ㈜신성건설 외 2개사

4. 준공기한 연기현황

(금액단위 : 원)

구 분	도 급 비	착공년원일	당초준공기한	변경준공기한	비 고
4차	3,983,000,000	‘14. 7.10	‘15. 6. 30	‘15. 12. 31
5차	2,933,111,000	‘15. 3.24	‘15. 6. 30	‘15. 12. 31
전체	18,242,000,000	‘12. 8. 2	‘15. 6. 30	‘15. 12. 31

5. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급자에 있지 않음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 :  강일삼거리 도시계획시설(도로)결정, 고덕교 및 고덕보도교                      설치, 방음형녹지 설치 등이 지연되어 절대공기 부족.

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기보고서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	박상철		광역도로과장	진재섭		토목부장	06/25 노우성
협조자	계약1팀장	김점선
시행	토목부-13109	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개