문서번호	조경과-3418
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
김효준	代윤희숙	심상원		06/25 송천헌
협 조	총무과장		이경로
	주무관		강명희

『2015년 서울대공원 식물전시공간연출용역』

설계변경 검토 보고

2015. 6

서울대공원

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2015년 서울대공원 식물전시공간연출 용역』

설계변경 검토 보고

「2015년 서울대공원 식물전시공간연출 용역」과 관련하여 아래와 같이 설계변경을 실시하여 보다 향상된 식물전시공간을 연출하고 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 서울대공원 식물전시공간연출 용역

□ 용역기간 : 2015. 4. 24 ~ 2015. 12. 28일 까지

□ 용역업체 : 공동수급 -분담이행방식

㈜도둠디자인(김명희), ㈜수암조경(지창규)

□ 사업위치 : 서울대공원 식물원, 친환경체험전시장, 테마가든 등

□ 예 산 액 : 금115,000,000원(부가가치세 포함)

□ 사업내용 : 식물원 기획공간연출, 장미원 공간연출, 초보도시농부전, 크리스마스․새해장식

Ⅱ		설계변경내용

□ 설계변경사유

❍ 제안서 심사결과보고(조경과-1834), 제안서 평가위원 의견에 따라 장미축제 활성화를 위해 장미원 내 공간연출 장식물 추가

❍ 비좁은 기획전시공간 확충을 위해 기획전시공간 통로 벽면도장, 등기구를 추가 설치하여 통로 벽면부를 전시공간으로 활용

❍ 기획전시공간 전시물 관리를 위해 입, 출구 슬라이딩 도어 설치

□ 설계변경 내용

공 종	주요 변경내용	변경 공사비			비 고
		당초	변경	증감
장미원 입구화단 장식	집모양, 동물모양, 사람모양패널 감 액자형,화단,입구 조형물, 그래픽패널 증 기존시설물(집, 자동차조화장식)보수 증	15,900	15,511	감388
장미원내 포토존	장미원 입구화단 감 어린왕자 벽면연출 구조틀 제작 증	11,162	15,185	증4,023
친환경체험전시장	도시농업관련 전시물 연출 감	12,020	10,720	감1,300
기획전시공간 조성	천정 텍스, 벽면도장, 등기구 증 입, 출구, 창고 문 증	24,676	42,645	증17,969
식물원간판설치	식물원간판 감	3,040	-	감3,040
크리스마스, 신년장식	-	8,977	8,977	-
브로셔,BI디자인	브로셔 감	4,650	950	감3,700
원가계산(부가세포함)	수도광열비, 세금과공과, 지급수수료 등 감	34,573	29,949	감4,624
총용역비		115,000	123,940	증8,940

□ 예산확보 : 본 용역 낙찰차액 활용

❍ 설계변경에 따른 추가 예산 : 금 8,940천원

❍ 낙찰차액 : 금 9,000천원

❍ 예산과목 : 공원이용시민 만족도 향상, 다양한 축제 및 볼거리 프로그램 운영, 식물전시 및 축제 프로그램, 행사운영비.

Ⅲ		보고자의견

□ 위 보고한 바와 같이 본 사업에 대하여 설계변경 조치하여 보다 향상된 식물전시공간을 연출함으로써 시민 고객 만족도 향상

따로붙임 : 변경설계서 1부.  끝.