문서번호	정보자원운영과-2199
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정보자원운영과장		데이터센터소장
임연주	임하정	代임하정		06/25 이계헌
협 조
	기획관리과장		代이정진
	인터넷통신과장		김진하

- 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 -

착수보고회 결과 보고

2015. 6

데이터센터

(정보자원운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립 -

착수보고회 결과 보고

『서울시 클라우드센터 정보화전략계획(ISP) 수립』 사업 계약이 체결됨에 따라 사업자와 서울시 간 일정 및 진행사항 공유를 위한 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		착수보고회 개요

□ 일시 : 2015.6.19.(금) 16:30 ~ 17:30

□ 장소 : 데이터센터 회의실(4층)

□ 참석자 : 총 50명

❍ 정보화기획관

❍ 5개 전산실 이전대상 : 이전부서 팀장 및 담당자

❍ 데이터센터 : 데이터센터 소장 및 각과장

❍ 정보시스템담당관, 공간정보담당관 클라우드 관련 담당자

❍ 정보기획담당관 IT COMPLEX 팀장 및 담당자

❍ 외부전문가

- 그린데이터센터인증위원회   나현묵 위원장

- 한국클라우드서비스산업협회 송희경 협회장

❍ 사업자 : 팬톰주식회사 및 ㈜대영유비텍 참여인력

※ 참석자 명단 : 붙임1

□ 보고자 : 팬톰주식회사 김창덕PM

□ 착수보고회 사진

Ⅱ		착수보고 내용

□ 사업개요 및 수행 범위

공간구성 분야	인프라 설계 분야	컨설팅 분야
- 일반현황 - 공간인프라 구성방안	- 서비스 구성 - 인프라 모델 - 적용방안	- 모델 수립 - 운영 계획 - 효과 분석

※ 착수보고 내용 : 붙임2

□ 사업 수행 방안

❍ 수행조직 : 공간설계, 인프라, 컨설팅 영역별 전문가 투입

❍ 추진일정 : 사업수행기간(6개월) 동안 자문회의(2회)를 통한 사업검토 및 진단

❍ 요청사항 : 현황분석 및 이관계획시 요청사항 상시 청취

Ⅲ		질의 응답

□ 외부전문가 자문내용

❍ 나현묵 위원장

- 그린데이터센터 구현을 위해 냉수공급문제, 외기도입을 검토하여 PUE를 개선하는 공공기관 최초 인증 대상으로써 로드맵 필요

※ 국내데이터센터 평균 PUE : 공공 2.0, 민간 1.5~1.7

- 기술난이도가 높은 클라우드 기술 적용에 있어 국산 솔루션 및 오픈소스를 활용하여 국내 산업발전에 기여

- 보안 관련해서 서버로그를 시각화하여 침해에 적극 대응

- 국제 그린데이터센터 표준안에 대한 설계․구축 고려

❍ 송희경 협회장

- 서울시가 지자체 대표 클라우드센터로 오픈된 정보를 대시민서비스에 활용할 기회 마련

- 그린데이터센터로 저전력 에너지를 사용, 쿨링에너지 절약, 고온 적용 서버 도입 등 고려

- 보안 부분을 강화하고 여러 국내기업이 참여하여 지자체가 공동으로 사용할 수 있는 클라우드 표준모델을 만들어 글로벌 진출 기회 마련

- 시민들에게 역동적으로 서비스 제공이 가능한 클라우드 혁신 모델을 발굴하여 세계에서 벤치마킹 할 수 있도록 노력

□ 질의 응답 내용

❍ 김병곤 팀장 : 전산장비 이전시 지원범위는 무엇인가?

- 노후장비 현황과, 재설계 대상에 대해서는 이전 시나리오를 계획하면서 현업 부서와 서비스에 관한 부분도 협의할 예정이며, 단위 업무를 선정하여 샘플로 이전 훈련을 시행할 예정임.

❍ 김병곤 팀장 : 인프라는 센터, 서비스 부분은 현업부서에서 예산 반영을 하도록 되어 있는데, 사업자는 어떤 지원이 가능한가?

- 구성이 파악되면 서비스 이관과 필요한 개발부분에 대한 방안을 마련하여 제공할 예정이며 업무용 프로그램 업그레이드 비용과 데이터 이관 비용은 부서가 산정하여야 함.

❍ 홍성우 팀장 : 5개부서 전산실이 센터로 이전했을때 장점은?

- 클라우드센터 관점에서 부서의 예산이나 장비 부족에 탄력적인 인프라 제공이 가능하며, 내년에는 단순 장비이전이 되어도 향후에는 클라우드에 수용되어 성과지표가 나올것으로 예상함.

❍ 권순복 팀장 : 전산실 이전에 집중되어 있는데, 향후 시스템 구축 계획은?

- 향후 예측하기 어려운 시스템 규격이나 서비스의 업데이트 추가를 위한 클라우드 서비스를  목적으로 인프라 설계를 할 계획임.

❍ 김용수 주무관 : 현재 시스템 이전 부서에서 준비할 사항이나 중요 포인트는 무엇인가?

- 장비의 형태를 확인하고, 무중단/중단의 기준을 마련하고 6~7월중에 활동 내역을 탬플릿으로 제공할 예정임.

❍ 엄태정 주무관 : 클라우드시스템 운영의 역량 강화의 의미는?

- 클라우드 시스템을 운영하려면, 클라우드 인프라에서 장애관리 및 예측 등을 적용하여 단계적으로 클라우드의 운영역량을 쌓아 발전시키는 것을 로드맵에 준비하여 반영할 예정임.

□ 지시사항 : 정보기획관

❍ 과업내용이 추상적이므로 수요부서의 요구사항이 반영 될 수 있도록 세밀한 조율이 필요하고, 탄력적인 공급 인프라 구축이 필요

❍ 서울시의 자가망 구축이 공공와이파이를 제공할 수 있었던 예처럼, 사업 결과에 구체적인 효과 제시

❍ 보안부분은 19층의 인프라의 시민 개방 가능성을 포함하여 검토

❍ 민간보다 경쟁력있는 클라우드센터 활성화 계획과 국산산업 활성화에 기여할 수 있는 중장기 계획 수립

Ⅳ		향후 계획

□ 향후 일정

❍ 6월 ~ 8월   : 현황 분석

❍ 9월 ~ 10월  : 이전 계획 수립

※ 9월중    : 중간보고 및 자문회의

❍ 10월 ~ 11월 : 중장기 발전계획

❍ 11월 27일   : 사업 완료