투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	설계변경소위원회 심의 의뢰

우리부에서 시행중인「용허리공원 빗물저류조 설치공사」와 관련 “사토운반거리 변경” 및 “강관 틀비계설치”, “하수관등 지중구조물 발생”에 대하여 다음과 같이「설계변경 소위원회」심의를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 소위원회 심의내용

【단위 : 천원】

공사명	심의내용	공사비			비고
		당초	변경	증ㆍ감
합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사	① 사토운반거리 변경	192,146	750,750	증)558,604
	② 강관 틀비계설치	-	11,500	증) 11,500
	③ 하수관등 지중구조물 발생	3,480	3,840	증) 360

붙임 : 설계변경심의 요청서 1 부. 끝.

	방재안전시설부장
주무관	한종수		치수시설과장	서관석		방재안전시설부장	03/06 박종웅
협조자
시행	방재안전시설부-3465	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관2동 2층 (서소문동 37)	/
전화	02 - 3708 - 8772	/전송	02 - 3708 - 8756	/	ggabii@seoul.go.kr	/	대시민공개