문서번호	도시철도계획부-5417
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공정관리과장	도시철도계획부장	도시철도국장
윤득근	이윤권	박상돈	전결 06/25 김준기
협 조

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』

통합 공정회의 개최결과 보고

2015. 6. 25.(목)

도시기반시설본부

도시철도계획부

작 성 자	도시철도계획부장 : 박상돈 ☎772-7020, 공정관리과장 : 이윤권 ☎7052, 담당 : 윤득근 ☎7158

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』

통합 공정회의 개최 결과 보고

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 효율적인 관리와 원할한 사업추진을 위하여 월간 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : 2015. 6. 23.(화) 13:30~15:00

○ 장    소 : 우이-신설 경전철 3공구 종합상황실

○ 참 석 자

- 발  주  청 : 도시철도국장, 도시철도설비부장, 공정관리과장,
분야별 담당과장 및 업무담당

- 사업시행자 : 법인대표자, 건설사업단장

- 현장관리자 : 각 공구 현장대리인 및 책임감리원
(궤도 및 시스템분야 포함)

□ 회의결과

○ 우이-신설 경전철 3공구 L10정거장 현장점검(아리랑고개 입구)

○ 통합 공정회의 주요 회의내용

- 현재 공정현황 및 작업 추진사항 보고

- 분야별 부진공정 만회대책 등 공정보고

- 분야별 인계⋅인수 일정 및 사업관리와 관련한 협조사항

- 사업추진에 따른 문제점 및 향후대책

- 기타 분야별 건의사항 등

○ 분야별 공정관리 보고(회의자료에 의함)

- 토목분야   : 우이경전철 1~4공구 현장대리인

- 궤도분야   : 시스템공구 현장대리인

- 시스템분야 : 시스템공구 현장대리인

○ 도시철도국장 지시사항

- 공사장 현장관리 철저

•기 보고한 토목구조물의 궤도공사 인계일을 준수하여 주시기 바라며, 공사기간에 쫓기더라도 가장 기본적인 품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바람.

•상호 겹치는 공정은 간섭이 되지 않도록 유기적인 현장회의를 통해 자율적으로 조정함으로써 공기를 만회하여 주시기 바람.

•잔여공사중 민원인과 마주치는 보도부 돌출물(출입구, 환기구 및 E/V구조물 등)은 중점적으로 관리할 수 있도록 시공 관리계획을 작성하여 보고하여 주시기 바람.(도시철도사업부 총괄)

•정거장 건축부분도 공사추진 현황을 작성하여 다음 회의시 부터 보고하여 주시기 바람.(도시철도건축부 총괄)

•우이경전철 2~3공구는 궤도공사 인계에 문제가 없도록 상호 협의하여 처리결과를 보고하여 주시기 바람(도시철도사업부 총괄)

- 우기철 수방대책 철저

•장마철 수방 및 안전관리 대책은 현장에서 바로 실행이 가능하도록 내실있게 관리하여 주시기 바람.

○ 발주처 주요의견

- 지하철 공사로 바쁜 중에도 중동호흡기 증후군(메르스)의 철저한 관리로 노고가 많음을 치하

- 시스템분야도 사전 준비를 철저히 하여 공정지연이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바람.

- 선행공정은 현재 공정에서 추가 공기지연이 발생하지 않아야 하며, 궤도분야 협조사항을 적극적으로 이행하여 주시기 바람.

□ 향후계획

○ 금회 회의결과 지시사항 및 주요의견은 다음 공정회의 시 보고

○ 공정회의 개최 : 2015. 7. 22.(수) 15:00
(현장여건에 따라 다소 변경될 수 있음)

붙임 : 통합 공정회의 사진 1부. 끝.

현   황   사   진

우이-신설 경전철 3공구 L10정거장 현장점검 및 통합 공정회의
일 시	2015. 6.23.(화) 13:30~15:00	장 소	우이-신설 경전철 3공구 종합상황실