서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(마포석유비축기지 공원네이밍 개발용역)

1. 공원조성과-8153(2015.6.24.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진 중인 “마포석유비축기지 재생 및 공원화사업”과 관련 『마포석유비축기지 공원네이밍개발 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 마포석유비축기지 공원네이밍개발 용역

나. 용역기간 : ‘15.3.11 ~ 6.30.

다. 계약금액 : 일금19,400,000원정(일금일천구백사십만원정)

라. 업 체 명 : ㈜올커뮤니테이션 대표 김 경 환

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2015. 3. 11. ~ 6. 30.

- 변 경 : 2015. 3. 11. ~ 8. 30.

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 서울시 공원조성과

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 1. 준공기한연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부(원본 별송).  끝.

	공원조성과장
주무관	가덕윤		생활공원팀장	유영봉		공원조성과장	06/25 오순환
협조자
시행	공원조성과-8200	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울특별시 중구 무교로 21, 9층 공원조성과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2071	/전송	02-2133-1081	/		/	부분공개(5)