문서번호	토목부-13058
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	광역도로과장	토목부장	시설국장
박상철	진재섭	노우성	06/25 형태경

준공기한 연기 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

2015. 6

도시기반시설본부

( 토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

준공기한 연기 검토 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

강일삼거리 도시계획시설(도로)결정, 고덕교 및 고덕보도교, 롯데캐슬아파트  방음벽 대체 녹지 설치 추진이 지연되어 공사 준공 기한을 연기코자 검토 보고하는 사항임

관련근거

○ 고덕감리2015-271호(‘15.6.22) : 공사기간 연장요청(전체분,4차분,5차분)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 암사IC~고덕동 훈련원사거리

○ 사업규모 : 도로개설 폭 31.5m, 연장 1.88km

○ 공사기간 : 2012. 8. 2 ~ 2015.6.30

- 4차 : ‘14.7.10 ~ ’15.6.30

- 5차 : ‘15.3.24 ~ ’15.6.30

○ 도 급 액 : 18,242,000,000원

- 4차 :  3,983,000,000원

- 5차 :  2,933,111,000원

○ 시 공 사 : ㈜신성건설외 2개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링

공정추진 현황

2015. 6. 현재

구 분	계 획(%)	실 적(%)	대 비(%)	비 고
전체 공사	100	71.96	71.96
4차 공사	100	45.20	45.20
5차 공사	100	0	0

준공기한 연장 검토

○ 준공기한 연장 요청내용

구 분	당 초	변 경	공기연장 요청일수	비 고
전체 공사	‘12. 8. 2~’15. 6.30 (1,063일)	‘12. 8. 2~’15.12.31 (1,247일)	184일
4차 공사	‘14. 7.10~’15. 6.30 (356일)	‘14.07.10~’15.12.31 (540일)	184일
5차 공사	‘15. 3.24~’15. 6.30 (99일)	‘15. 3.24.~’15.12.31 (283일)	184일

○ 공사기간 연장 요청일수  : 184일

- 강일삼거리 도시계획시설(도로) 결정 지연일수 : 184일

- 대우아파트,아남아파트,롯데캐슬아파트 방음형녹지설치 지연일수 : 123일

- 강일삼거리 RC옹벽 설치 지연일수 : 184일

- 고덕교, 고덕보도교 설치 지연 : 184일

○ 준공기한 연장 요청 사유

- 강일삼거리 도시계획시설(도로) 결정 지연

- 대우․아남․롯데아파트 방음벽대체 녹지 협약 지연

- 강일삼거리 RC옹벽 설치 지연

- 고덕교, 고덕보도교 설치 지연

잔여공사 추진계획

○ 붙임 변경 예정공정표 참조

감리단 검토의견

○ 4차공사

- 정수장 방호시설(울타리) 협의 및 정수장사거리~훈련원사거리 구간내 아파트(아남,대우,롯데)에서 방음벽을 방음형 녹지로 변경요구(가을 수목식재 타당)

○ 5차공사

- 강일삼거리 도시계획시설(도로) 결정 지연 및 고덕교․고덕보도교는 5호선 하남선(1-2공구)공사와 간섭되어 변경 시공 검토 중

○ 상기 사유로 관련부서 협의 및 보상 추진 등 제반 여건을 감안 전체 공사에 대하여 공기 연장함이 타당함.

구 분	공 사 기 간				공기연장 일 수	비 고
	당 초		변 경
	공사기간	일 수	공사기간	일 수
전체공사	2012. 8. 2~ 2015. 6.30	1,063일	2012. 8. 2.~ 2015.12.31	1,247일	증)184일
4차공사	2014. 7.10~ 2015. 6.30	356일	2014. 7.10.~ 2015.12.31	540일	증)184일
5차공사	2015. 3.24~ 2015. 6.30	99일	2015. 3.24.~ 2015.12.31	283일	증)184일

조치계획

○ 감리단 검토의견대로 전체, 4차 및 5차 공사의 준공기한을 연기하여 공사 시행함이 타당하다고 사료됩니다

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자에게 있지 않음

- 지체상금부과여부 : 미부과

붙임 : 1)감리단 검토의견서 1부(별도).

2)예정공정표 3부.  끝.