함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	계약의뢰(2014년 마포구 관내 상수도공사(급수공사) 건설폐기물처리용역)

우리과에서 시행중인  “2014년 마포구 관내 상수도공사(급수공사) 건설폐기물처리용역(장기계속계약)” 에 대하여 아래와 같이 설계변경 후 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 마포구 관내 상수도공사(급수공사) 건설폐기물처리용역(장기계속계약)

나. 계약상대자 : 서울 E.N.T(주) 대표 안 성 효

다. 계약기간 : 2014.03.17. ~ 2015.06.30

라. 변경사유 : 계약물량 감소 및 계약기간 만료

마. 변경내역

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
도급비	금 차	35,946,000	14,800,000	감)21,146,000
	총 차	35,946,000	14,800,000	감)21,146,000

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

- 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비(배급수비)            -

따로붙임 : 1) 설계변경 관련도서 각1부.

2) 합의서 1부.   끝.

	급수운영과장
주무관	신정우		급수운영과장	06/26 장종욱
협조자
시행	급수운영과-13567	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3651	/전송	3146-3689	/	SJWOO67@seoul.go.kr	/	대시민공개