문서번호	급수운영과-5235
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	북부수도사업소장
박영률	김수영	03/06 이종백

2014년 노후 옥내 공용배관 교체 중점 추진계획

2014. 3.

북 부 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

14. 노후 옥내 공용배관 교체 중점 추진계획

녹물이 나오는 '94년 이전 건축한 아파트 노후 옥내 공용배관을 중점 교체하여 최상의 아리수를 음용할 수 있는 급수환경 조성 추진

□ 사업목표

○ 노후 공용배관 교체 4,800가구 (총 1,145백만원)

- 노후 세대배관 교체 500가구 (총 349백만원)

□ 추진계획

○ 2014년도 사업목표

- 교체가구 : 5,300가구(공용배관 4800가구, 세대배관 500가구)

- 지원예산 : 1,494백만원

※ 공용배관 교체시 세대배관 병행 추진

- 분기별 추진계획

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
교체가구	5,300	800	1,500	1,500	1,500
예산(백만원)	1,145	185	320	320	320

※2014년 배관교체 계획가구 10월까지 공사 완료 추진

○ 연차별 추진계획

- 노후 공용배관 교체

구 분	계	기교체	향후 계획
		’07~’13	소 계	’14	’15	’16	’17	‘18이후
교체가구	93,732	18,491	75,241	4,800	5,000	5,000	5,000	55,441
교체율(%)	100	19.9	80.1	5.1	5.3	5.3	5.3	59.1
사업비(백만원)	21,443	3,698	17,745	1,145	1,200	1,200	1,200	13,000

- 노후 세대배관 교체

구 분	계	기교체	향후 계획
		’07~’13	소 계	’14	’15	’16	’17	‘18 이후
교체가구	23,928	12,401	11,527	500	500	500	500	9,027
교체율(%)	100	51.8	48.2	2.1	2.1	2.1	4.2	37.7
사업비(백만원)	13,385	4,986	8,399	349	350	350	350	7,000

※ 연차별 ’15년 이후 교체가구는 사업비에 따라 변동될 수 있음

□ 세부 추진계획(추진방법)

○ 공용배관 교체 활성화 방안으로 지원비용 세대별 20만원에서 최대 25만원으로 인상하여 교체 추진( ‘14.2.5부터 적용)

‣ 급수설비과-735(‘14.2.6) 노후 옥내 공용배관 표준공사비 조정계획과 관련임

- 소규모 주택 : 교체비용의 50~80%를 지원하여 교체 추진

‣ 옥내배관 컨설팅을 통하여 노후배관 교체 적극 유도

‣ 옥내배관 노후상태 진단 및 기술지도 상담, 지원제도 홍보 등

- 중․대규모 주택 : 홍보를 통하여 교체하도록 적극 유도

‣ 동일 단지 내에 소형과 혼재되어 있는 중․대형 주택은 공용배관 교체비용을 세대당 25만원 이내 지원하여 세대 내부배관 교체 유도

○ 아파트 단지별 주민설명회 개최 추진

- 주민설명회개최 완료 아파트

연번	아파트명	세대수	개최일시
1	노원 현대아파트	259	2014.1.23

- 주민설명회 개최 예정 아파트

‣ 5개 단지 5,729가구

연번	우선 선정 아파트	가구수	예상지원액(백만원)	추진일정
1	창1동 주공3단지	2,856	571	‘14. 3월
2	상계2동 노원현대	259	52
3	창동 주공19단지	1,764	353
4	하계동 한신코아빌라	160	32
5	금호2차아파트	690	138

○ 교체대상 가구 홍보[설득] 강화

※ 홍보물은 본부 업무처리지침 개정 후 변경된 내용으로 홍보물 인쇄 및     배포 예정 (3월중순)

‣ 공용배관 교체 필요성에 대한 적극적인 홍보실시 : 관리사무소, 입주자

대표회, 부녀회

‣ 통․반장 회의시 배포 및 사업취지 설명

· 홍보용 리플렛 구청 민원실 및 동사무소 비치

· 지역신문, 케이블방송사 협조를 통한 홍보

· 공용배관 교체공사 시 단지내 현장사무실 운영 세대배관 홍보 및 신청 접수

□ 행정사항

○ 옥내배관 실태 전수조사 시 파악된 교체대상가구 List 및 교체여부를

GIS프로그램에 입력 마무리하고, 기 교체된 가구도 GIS프로그램

에 입력